투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	전면책임감리용역 설계변경(전체7회, 8차1회) 계약 의뢰

우리 본부에서 시행 중인『강남순환도시고속도로(8공구)건설공사 전면책임감리용역』에 대하여 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 강남순환도시고속도로(8공구)건설공사 전면책임감리용역

나. 용 역 비 : 금10,874,090천원

다. 용역기간 : 2002.12.31. ~ 2018.07.31.

라. 용역업체 : ㈜동명기술공단종합건축사사무소  대표 신완수

마. 예산과목

- 도로계획과, 도로건설, 도시고속도로망확충(도시개발특별회계), 강남순환도시고속도로건설, 시설비및부대비(401), 감리비(02)

바. 설계변경 내역

(단위:천원)

구 분		당 초	변 경	비 고
총 괄	기 간	`02.12.31.~`18.7.31.	`02.12.31.~`18.7.31.
	금 액	10,874,090	10,874,090
8 차	기 간	`14. 5. 31~`15. 4. 16.	`14. 5. 31.~`15. 6. 10.	증) 55일
	금 액	900,000	900,000

붙 임 :  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(전체 7회, 8차1회) 각 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김구		도시고속도로과장	홍숭희		토목부장	04/14 노우성
협조자	주무관	유근평		계약2팀장	홍연화
시행	토목부-7581	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8667	/전송	02-3708-2599	/	neuf@seoul.go.kr	/	대시민공개