문서번호	조경과-5297
결재일자	2015.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경관리팀장	조경과장
박찬홍		조윤래	04/14 이원영
협조

- 도시구조물 벽면녹화 사업 -

사업 대상지 변경 요청 건 검토보고

2015. 4.

푸른도시국

(조 경 과)

- 도시구조물 벽면녹화 사업 -

사업 대상지 변경요청 건 검토보고

관악구청으로 부터 ‘2015년 도시구조물 벽면녹화 사업’ 대상지 변경 요청이 있어 검토하고 보고합니다.

□ 사업개요

○ 위    치 : 성동구 응봉동 265-169 (독서당로 431) 등 8개소

○ 사업기간 : 2015. 2.~ 2015. 6.

○ 사 업 비 : 415백만원

○ 사업내용 : 식재기반 조성, 덩굴식물 및 수목식재 등

□ 변경 요청사항

구 분	위 치	관리	사업내용	변경사유
당 초	마장로	시관리	홍익동 590 주변 마장로 왕십리천주교회 담장 벽면녹화	교회측에서 시공반대 민원으로 사업시행 불가
	아차산로	시관리	성수1가2동 아차산로 뚝섬역옆 방음벽	주면 상인 반대 민원 및 장애인유도블럭으로 인해 시공이 불가
변 경	왕십리로	시관리	행당동(130-99) 일대 옹벽으로 기존 녹지가 있지만 옹벽노출로 경관이 불량	2015년 대상지로 변경하여 노출옹벽을 녹화하여 녹시율을 향상시키고자 함.
	왕십리로	시관리	행당동(150-2) 일대 2단 옹벽으로 기존 녹지가 있지만 옹벽노출로 경관이 불량	2015년 대상지로 변경하여 노출옹벽을 녹화하여 녹시율을 향상시키고자 함

□ 변경 대상지 검토결과

○ 왕십리로(시도로)의 도로변 옹벽 구조물 2개소로서 벽면녹화를 위해 덩굴식물을 심을 수 있는 녹지대가 이미 설치되어 있어 덩굴식물만 식재하여 최소 비용으로 벽면녹화가 가능하고 삼부아파트 주민 등 유동 인구가 많아 사업효과가 높음

□ 보고자 의견

○ 2015년 도시구조물 벽면녹화 사업의 대상지를 변경 요청한 것으로 사업의 필요 및 시급성을 감안할 경우 변경사유가 타당하고

○ 도시구조물 벽면녹화 사업의 변경 대상지와 사업내용이 적합하므로 변경 승인하고자 함.

붙임 : 사업대상지 변경 보고서 1부.  끝.