문서번호	도시철도사업부-3239
결재일자	2015.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	경전철1과장	도시철도사업부장
정영호	박동룡	전결 04/15 이은상
협 조	경전철2과장		최광무
	주무관		위성환

- 도시철도 건설공사 시민과의 소통을 위한 -

“시민 현장체험단” 추진계획 변경 보고

2015. 4.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

- 도시철도 건설공사 시민과의 소통을 위한 -

“시민 현장체험단” 추진계획 변경보고

서울시 최초로 시행되는 [우이~신설 경전철 건설공사]에 대하여 시민과의 소통 강화 및 시정 신뢰 향상을 위해 추진하는 “시민현장체험단” 추진계획 변경에 대한 보고임

Ⅰ				관 련 근 거

우이신설 “시민 현장체험단” 운영 추진[본부장님 방침(도철사업부-155, ´15.01.08.)

Ⅱ				시민 현장체험단 운영 개요

추진대상 : 우이~신설 도시철도(경량전철) 건설공사(1~4공구)

운영기간 : 2015. 03 ~ 2016. 11 건설 종료시까지(월 1~2회)

주요 운영내용

- 내가 타고 다닐 경전철 건설 과정에 대한 다양한 에피소드 체험

- 지하 정거장 구조물․터널을 직접 걸어보며 느끼는 현장 체험 참여

- 서울시 지하철 41년 건설 역사를 담은 사진전 관람 기회 제공

- 현장 체험단 건의사항 및 의견 수렴을 통한 시민 중심 사업 추진

Ⅲ				보 고 내 용

운영 시점 조정 : ´15년 3월 → ´15년 6월

- 현재 우이신설 현장은 구조물공사가 동시다발적으로 진행되고 있고 후속공종의 원활한 작업장 인계를 위해 야간 및 철야작업을 시행중에 있음에 따라,

- 현재 여건에서 시민 현장 체험단 운영시 밀폐공간내 작업 진행에 따른 쾌적한 체험환경 제공이 어렵고, 자재 낙하 및 위험물 존치(고압가스통 등)로 인해 시민들의 안전사고 발생 우려

- 이에 시민의 안전을 최우선으로 확보하고 쾌적한 체험환경을 제공하고자 체험단 운영 시점을 15년 6월(토목구조물 완료-뒷 정리 포함)로 변경시행코자 함.

※ 현재 공구별 체험단 운영 계획 및 체험노선 선정 완료하였으며, 사업시행자측에서도 시민현장체험단 일정 변경 요청(우이(공사)제2015-186호, 15.03.09)

Ⅳ				향 후 계 획

2015.  5 : 체험단 세부 운영 및 홍보 계획 제출(사업시행자)

2015.  6 : 체험단 운영(본부+사업시행자)

2015. 12 : 운영 효과 분석 및 타 현장 확대 시행

붙   임 : 시민현장체험단 운영계획(공구별) 1부.  끝.