보    고    서

등록번호	시설관리과-10208

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	유형근	한상근	04/15 代채재일

명에 의거 지역담당 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

2015. 04. 14

복 명 자 : 지방시설주사보  유형근

공사현황

❍ 공 사 명 : 2014 정릉동등 10개동 상수도공사

❍ 현   황

지시번호	공사 위치	지시기간	연기요청일	비 고
개량 166	하월곡동 90-124외	2015.03.24~ 04.15	2015.04.30	단수작업 수반을 요하여 단수작업 수립후 공사 예정

❍ 요   지 : 공사기간 연기

보고내용

❍ 위와 같이 급수공사 작업지시 하였으나, 유수장애 상수도관 정비시 단수작업 수반되는 사항임에 단수작업 계획 수립 후 급수공사 예정임에 작업연기 함.

처리의견

❍ 상기와 같은 사항으로 위 작업지시 건에 대한 공사기간을 공사가능시(연기요청일)까지 연기코자 합니다.

❍ 귀책사유 : 중부수도사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.