문서번호	토목부-7724
결재일자	2015.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박상철		진재섭	04/15 노우성
협조

미끄럼방지 포장 설치 검토보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4.

도시기반시설본부

(토 목 부)

미끄럼방지 포장 설치 검토보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

본 공사 구간인 대우아파트 ~ 훈련원 사거리 구간에 설치되어 있던 미끄럼 방지포장을 복구설치코자 검토 보고하는 사항임.

■ 공사개요

◦ 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

◦ 공사규모 : 도로개설 B=31.5m, L=1,880m

◦ 공사기간 : 2012. 8. 2 ～ 2015. 6. 30

◦ 도 급 비 : 18,242백만원

◦ 시 공 사 : ㈜신성건설외 2개사

◦ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

■ 현 황

◦ 위치도

아남아파트

명덕초등학교

직업훈련원

롯  데  케  슬  아  파  트

정수장

사거리

훈련원

사거리

범 례
미끄럼방지 포장

◦ 면적 4,817㎡

◦ 금회 포장 덧씌우기 및 확장공사로 인하여 기 설치되어 있던 미끄럼방지 포장이 제거된 상태임

■ 단가비교

구 분	서울시 단가	조달청 단가		비 고
		최저가	최고가
금 액	52,136	31,800	37,200	시공비 포함

■ 계약단가 단가적용 방안 검토

구분	도급자 계약	조달 계약
장, 단점	ㆍ공사 시공관리 효율적 ㆍ하자 발생시 책임소재 분명 - 원도급자 포장하자 전반 책임	ㆍ지속적인 하자 관리 : 발주처 (조달업체: 하자보증서 제출) . 다수업체 제품선정 곤란 . 입찰, 계약체결 및 시공 준비에 다소 시공기간 소요 및 시공시 업체간 협의에 혼선 우려
단가적용	ㆍ조달청 단가 적용	. 조달청 계약단가 또는 입찰시행 단가 적용 / 입찰 및 계약기간 추가필요 - 계약기간 다소 필요

■ 감리단 검토의견

○ 미끄럼방지포장 단가 적용은 경제성을 고려 서울시 품셈기준 단가보다 조달청에 등재된 제품 중 최저가격 단가로 공사비를 산출하며

○ 본 공사는 국토교통부 “도로안전시설 설치 및 관리지침”에 제시된 시방기준에  의거 시행지시 하고추후 설계변경 시 반영토록 함.

○ 공사비 산출 : 153,180,000원을 공사비로 반영(제경비 포함)

※ 조달청 발주금액 산정 방법

: (수량×단가) = 4,817㎡×31,800원 ≒ 153,180,000원

■ 조치의견

○ 상기 감리단 검토의견대로 승인하고 추후 설계변경심의 결과에 따라 정산 처리 함이 타당하다고 사료됨.

- 개략공사비 : 증) 153백만원

붙  임 : 책임감리원 검토의견서 1부.  끝.