문서번호	수집연구과-591
결재일자	2014.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수집연구과장	학예연구부장		서울시립미술관장
도수연	최관호	선승혜		02/13 김홍희
협 조
	총무과장		정창훈
	주무관		한덕주

『서울시립미술관 소장작품(강익중) 로비 설치작업』

준공기한 연기 보고

2014. 2

서울시립미술관

<수집연구과>

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

『서울시립미술관 소장작품(강익중) 로비 설치작업』

준공기한 연기 보고

『서울시립미술관 소장작품(강익중) 로비 설치작업』사업 추진과정에서 변경사항이 발생하였기에 충분한 준공기한을 확보함으로써 사업수행에 만전을 기하고자 함.

사업개요

❍ 사 업 명 : 서울시립미술관 소장작품(강익중) 로비 설치작업

❍ 사업기간 : 2014. 2. 10. ~ 2014. 2. 14.

❍ 사 업 비 : 6,010,000원

❍ 계약업체 : 장황문화재연구소. 차가방[대표 정찬정]

❍ 사업내용 : 소장작품(강익중) 전시동 1층 로비 설치

준공기한 변경

❍ 납품기한

- 당  초 : 2014. 2. 10. ~ 2014. 2. 14.

- 변  경 : 2014. 2. 10. ~ 2014. 2. 28.

❍ 변경사유

- 작품 설치 골격의 형태 변경 및 설치 완료후 작품 왜곡, 뒤틀림 현상에 대한 검수 시간 확보

붙 임 : 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

준공기한 연기의뢰서

1. 용역개요

❍ 용 역 명 : 서울시립미술관 소장작품(강익중) 로비 설치작업

❍ 용역기간 : 2014. 2. 10. ~ 2014. 2. 14.

❍ 용 역 비 : 6,010,000원

❍ 계약업체 : 장황문화재연구소. 차가방[대표 정찬정]

❍ 용역내용 : 소장작품(강익중) 전시동 1층 로비 설치

2. 준공기한 연기

❍ 납품기한

- 당  초 : 2014. 2. 10. ~ 2014. 2. 14.

- 변  경 : 2014. 2. 10. ~ 2014. 2. 28.

❍ 변경사유

- 작품 설치 골격의 형태 변경 및 설치 완료후 작품 왜곡, 뒤틀림 현상에 대한 검수 시간 확보

2014. 2.

수집연구과 학예연구사  도 수 연  (인)

수집연구과 과      장  최 관 호  (인)

서울시립미술관경리관 귀하