“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	용역 설계변경 시행(잠실대교 정밀안전진단 용역)

1. 우리 과에서 시행 중에 있는 『잠실대교 정밀안전진단 용역』과 관련하여 자문비용에 대하여 정산하고 아래와 같이 설계변경 시행 하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 잠실대교 정밀안전진단 용역

나. 규    모 : 잠실대교 본선 B = 35m,  L = 1,280m(상·하행 8차로)

램프 B = 7m,   L = 345m

다. 용역기간 : 2014. 4. 21.∼ 2015. 5. 14

라. 도 급 자 : (재)한국재난연구원 대표 윤영조

미승씨앤에스검사(주) 대표 김 승

마. 지체상금 부과 여부 : 미 부과(귀책사유, 자문비 미 정산)

바. 설계변경 사유 : 자문비용 정산에 따른 설계변경

사. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
공급가액	233,681,818	232,281,818	감)1,400,000
부 가 세	23,368,182	23,228,182	감)140,000
도 급 비	257,050,000	255,510,000	감)1,540,000	자문비 정산

아. 예산과목 : 도시안전본부 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물 운영,

시설물안전점검 및 진단, 시설비

붙 임 : 1) 변경내역서 1부.

2) 변경 보고서 1부.

3) 합의각서 1부.

4) 납본 확인증 1부.  끝.

주무관	김시련		강구조교량팀장	류봉현		교량안전과장	04/15 이용심
협조자
시행	교량안전과-6509	(		)	접수		(		)
우	100-714	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	02)2133-1962	/전송	02)2133-1429	/	siryeon@seoul.go.kr	/	대시민공개