문서번호	토목부-7716
결재일자	2015.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
홍상필		권혁대	04/15 노우성
협조
	주무관		박근우

교통안전시설물 정비 및 설치 보고

(서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

2015. 4.

도시기반시설본부

(토목부)

교통안전시설물 정비 및 설치 보고

(서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

공사장 주변에 설치된 교통안전시설물이 공사가 장기간 진행됨에 따라  훼손· 노후되어 안전과 미관을 저해하므로 정비하고, 교통정체가 심한 보광삼거리에 교통안내간판 추가 설치에 대한 보고임

Ⅰ		관련근거

○ 한종(서빙고)제15-065호(2015. 4.10.) 실정보고

- 업무지시 SMIH-14-38268호(‘14. 9.23.) : 공사장 주변 정비

- 업무지시 도시기반시설본부-14-44423호(‘14.11.13.) : 교통안전시설물 보수요청

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 용산구 보광동 ∼ 주성동(두무개길 ∼ 강변북로)

○ 규    모 : 기존고가 철거 : B=16m, L=510m

고가설치 : B=6.4m, L=115m / B=10.4m, L=290m

○ 공사기간 : 총괄(2011. 1. 6.∼2015.12.31.), 5차(2015. 3. 2.∼2015.12.31.)

○ 도 급 비 : 총괄(20,221백만원), 5차(7,893백만원)

○ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 외1  ○ 시 공 사 : 주식회사 흥화 외1

Ⅲ		감리단 보고내용

□ 교통안전시설물 정비

① 정비사유

- 장기간 사용에 따른 노후로 안전확보 미흡 및 미관저해

- 강풍 및 차량충돌시 안전성 취약

② 정비현황

정비구간	교통안전시설물	정비수량	비고
가도교 주변	PE 방호벽	48m
고가교 시점부(U턴구간)	PE 드럼	30EA

□ 교통안내표지판 설치

① 설치사유

- 보광삼거리(용산→한남방면) 1차로(좌회전 차로) 대기차량으로    인한 직진차로 정체로 민원이 다수 발생함에 따라 “1차로    좌회전 우선”표지판 설치

② 설치현황

설치구간	교통안내표지판	설치수량	비고
보광삼거리	차량통과 규제표지판	1EA

□ 설치수량 및 공사비 증·감 현황

① 설치수량

품 명	규격	단위	당 초	변경	증․감	비고
PE드럼		ea	600	630	30
PE방호벽	1.2m	m	234	282	48
교통안내표지판	AL1000×600,고휘도	ea	0	1	1

② 공사비 증·감 현황

(단위 : 천원)

공 종 명	규 격	단가	당 초	변경	증ㆍ감	비고
5.부 대 공
5.15 안전시설비
PE드럼		12,146	7,288	7,652	364
PE방호벽		90,481	21,172	25,540	4,368
교통안내표지판	AL1000×600,고휘도	700,000	-	700	700
직접공사비			28,460	33,893	5,433
제 경 비			7,298	8,565	1,267
공 급 액			35,758	42,458	6,700
부가가치세			3,575	4,245	670
도 급 액			39,333	46,703	7,370

※ 신규단가인 교통안내표지판은 낙찰율 81.57% 적용

Ⅳ		검토의견 및 조치계획

○ 감리단 보고내용과 같이 장기간 공사진행으로 인해 공사구간 주변에 설치한 교통안전시설물의 노후 및 훼손에 따른 정비, 보광삼거리 좌회전 대기차량으로 교통정체에 대한 안내간판 설치가 적정한 것으로 판단되는바, 향후 설계변경시 반영 조치하고자 함

붙  임 : 감리검토의견서 1부.  끝.