문서번호	도로계획과-1840
결재일자	2014.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	간선도로계획팀장	도로계획과장	시설안전정책관		도시안전실장
신대식	김기용	형태경	정시윤		02/13 조성일
협 조

KTX 수서역 등 기반시설 입지에 따른

도로개선대책 검토용역 시행계획

2014. 2

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(	강남구 주민 등	)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 ■ 재해 □ 기타 □				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 ■ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	강남구, 송파구, 서초구	)	무 □
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

KTX 수서역 등 기반시설 입지에 따른

도로개선대책 검토용역 시행계획

KTX 수서역 건립, 강남 및 세곡2지구 보금자리주택 입주, 영동권역 종합발전계획 수립 등으로 증가되는 교통량을 효과적으로 분산처리하기 위한 도로개선대책 검토용역 시행계획 보고임.

□ 사업개요

○ 위    치 : 세곡동 사거리∼청담대교 남단, 헌릉로(용인∼서울 고속도로 접속구간)

○ 규    모 : 지하차도 신설 : 폭 21.5m(4차로), 연장 5.0km,

도로확장 : 6차로 → 8∼10차로, 연장 5.3km

○ 사업기간 : 2014. 2 ∼ 2018. 12

○ 총사업비 : 4,300억원(공사비 4,016, 보상비 256, 설계 등 28)

※ 타당성조사 및 기본계획 용역비 : 5억원

□ 추진경위

○ ’09.12 : 세곡2보금자리주택사업 착공

○ ’10.11 : 강남보금자리주택사업 착공

○ ’11.05 : KTX 수서역사 건립공사 착공

○ ’13.05 : 영동권역 종합발전계획 수립용역 착수

- COXE, 한전, 서울의료원, 한국감정원, 탄천변, 잠실운동장, SETEX 등 포함

○ ’13.12 : 강남보금자리주택 완공(입주시기 : ‘12.9~’15.9)

□ 현안사항

○ KTX 수서역사 건립, 서울세곡2보금자리 주택지구, 서울강남보금자리 주택지구 입주에 따른 유발교통량 처리계획 수립 필요.

○ 영동권역(COEX, 한전, 서울의료원, 한국감정원, 탄천변, 잠실운동장, SETEX) 종합발전계획 수립과 연계한 주변지역 도로개선대책 수립 필요.

○ 사업구간내 남북을 연결하는 밤고개길 병목구간 도로확장(6→8차로) 및 동서를 연결하는 헌릉로(용인~서울 고속도로 접속구간) 병목구간 도로확장(6→10차로) 계획 수립 필요.

□ 검토의견

○ KTX 수서역 건립, 강남 및 세곡2지구 보금자리주택 입주, 영동권역 종합발전계획 수립 등으로 증가되는 교통량을 효과적으로 분산처리하기 위한 도로개선대책을 수립하여 대규모 개발사업에 따른 교통수요에 대비하고 교통정체 해소 및 주민편익 증진에 기여코자 함.

□ 향후계획

○ ’14.  2.  : 용역타당성심사 및 용역발주전 심의(기술심사담당관)

○ ’14.  3.  : 타당성조사 및 기본계획 용역발주

○ ’14.  3.  : 용역계약 및 착수

○ ’14. 12.  : 용역준공

붙임 : 위치도 1부. 끝.