문서번호	주거환경과-1417
결재일자	2014.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주거환경관리팀장	주거환경과장		주거재생정책관
임동수	양준모	최성태		02/17 진희선
협 조

방학동 주거환경관리사업

운영위원회 정례회의 개최 결과보고

2014. 2

주택정책실

(주거환경과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(	도봉구 방학동 주민	)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	도봉구청 도시계획과	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

방학동 주거환경관리사업

운영위원회 정례회의 개최 결과보고

방학동 주거환경관리사업과 관련하여 운영위원회 정례회의 개최하고 그 결과 보고임

회의 개요

❍ 일  시 : ‘14. 2. 12(수) 13:00 ~ 15:00

❍ 장  소 : 방아골 종합사회복지관 지하1층 회의실

❍ 참  석

- 주민 : 운영위원 4명(김정숙, 손일현, 오현아, 민선미) 및 주민 2명(김영란, 윤상곤)

- 내부 : 주거환경과 및 도봉구 담당, 자문계획가 윤전우, 시공사(마을회관/기반시설)

주요내용

❍ 마을밥상 관련

- 현재 방아골 종합사회복지관 지하공간을 활용하여 운영 중

․ 복지관 직원, 현장 작업자 등 일 평균 30여명 이용 중으로 사업 호응도 높음

- 지하 공간 사용기간 만기(2.14) 후 대체 공간 확보 중

❍ 공사 진행 관련

- 기반시설 : 도로 포장 완료 후 동절기 공사 중단 중.

5월 초 공사 완료(3월 말 도막형 포장 시작, 1.5개월 소요)

- 마을회관 : 철거 공사 진행 중.

3월 말 리모델링 완료(인테리어 및 집기 구매 후 4월 말 주민 활용)

※ 4월 개관 및 운영을 위한 출자금 및 조합원 모집 등 협동조합 설립 추진

❍ 경성부동산 건물 관련

- 마을회관 리모델링 공사 일정에 맞춰 4월 중순까지 철거 요청(운영위원회)

․ 마을입구로서의 상징성 및 잔디광장 조성 예정인 나대지와의 연계성 확보

- 세입자 현황 : 2세대 활용 중(1층 사무실 공간 및 2층 주거공간 각 1세대)

검토의견

❍ 마을밥상 관련

- 동절기 이후 경성부동산 건물 1층 공간 활용 또는 타 공간 확보 검토

❍ 공사 및 경성부동산 건물 관련

- 기반시설 및 마을회관 공사 기간 내에 경성부동산 철거 추진

․ 현재 세입자 인근 공공임대주택 등 이주 유도

회의 사진

주민 운영위원회 회의 사진
기존 건물 철거	철거 후(1층)

향후 계획

❍ ‘14. 2월 : 협동조합 설립 추진(조합원 모집 등)

❍ ‘14. 3월 : 마을회관 리모델링 공사 완료. 끝.