문서번호	토목부-7841
결재일자	2015.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
홍상필		권혁대	04/16 노우성
협조
	주무관		박근우

교각(P2) 가시설 배면 그라우팅 정산 검토보고

(서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

2015. 4.

도시기반시설본부

(토목부)

교각(P2) 가시설 배면 그라우팅 정산 검토보고

(서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

교각(P2) 시공을 위한 가시설을 하면서 토류판으로 시공토록 설계되었으나 굴착결과 지층구성 상태가 자갈섞인 모래층으로 시공이 불가하고 안전성에도 문제가 있어 지반보강 그라우팅으로 변경 시공함에 따른 정산 검토보고임

Ⅰ		관련근거

○ 한종(서빙고)제15-046호(2015. 3.30.) 실정보고

- 공사계약일반조건 제19조(설계변경 등) ①의 2. 지질, 용수 등     공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 용산구 보광동 ∼ 주성동(두무개길 ∼ 강변북로)

○ 규    모 : 기존고가 철거 : B=16m, L=510m

고가설치 : B=6.4m, L=115m / B=10.4m, L=290m

○ 공사기간 : 2011. 1. 6.∼2015.12.31.

○ 도 급 비 : 20,221백만원

○ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 외1  ○ 시 공 사 : 주식회사 흥화 외1

Ⅲ		감리단 보고내용

□ 가시설 배면 지반보강 그라우팅 시공

① 보고사유

- 교각 P2 가시설 토류판 배면설치시 배면 지층구성 상태가    자갈섞인 모래층으로 지반이 흘러내려 토류판 시공이 불가함에    따라 현장여건을 반영한 지반보강 그라우팅 시공에 따른 보고임

② 현황 및 문제점

○ 현 황

- 가시설 설치를 위한 현장 터파기시 자갈섞인 모래층 지반이 나옴

- 기본 및 실시설계 지반조사시 자갈섞인 실트질 모래층으로      가시설 배면에 대한 지반보강이 설계에 미반영되어 있음

○ 문제점

- 지반 흘려내림으로 가시설 토류판 시공불가

- 가시설배면 두무개길 도로 침하 발생 우려

※ 한남방향 이격거리 0.5m, 용산방향 이격거리 1.13m

③ 지반보강 그라우팅 시공현황

○ 가시설 배면 지반 보강 그라우팅(LW공법) 실시

구분	확산반경 (㎜)	깊이(m)	공수 (EA)	면적 (㎡)	주입율	주입량 (㎥)	비고
수평	800	2.0m	132	66	0.297	39	교축방향
			16	8		5	교축직각
합계			148	74		44

○ 시공도면

④ 공사비 증·감 현황

(단위 : 천원)

공 종	당 초		변경		증·감		비고
	수량 (㎥)	금액	수량 (㎥)	변경	수량 (㎥)	금액
1. 구조물공
1.1 Steel Box교		-		12,881		12,881
1. 그라우팅	-	-	44	12,881	44	12,881
직접공사비	-	-	-	12,881		12,881
제경비	-	-	-	4,810		4,810
공 급 가 액	-	-	-	17,691		17,691
부가가치세	-	-	-	1,769		1,769
도급금액	-	-	-	19,460		19,460

※ 신규단가 낙찰율 81.57% 적용

Ⅳ		검토의견 및 조치계획

○ 감리단 보고내용과 같이 당초 설계와 현장여건이 상이한 사항에 대한 지반보강 그라우팅 시공 및 정산이 적정한 것으로 판단되는바, 향후 설계변경시 반영 조치하고자 함

붙  임 : 감리검토의견서 1부.  끝.