문서번호	녹색에너지과-1382
결재일자	2014.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	햇빛발전팀장	녹색에너지과장	기후변화정책관		기후환경본부장
석은주	이재성	권민	김용복		01/22 장혁재
협 조
	전력관리팀장			이영목

'14년 공공시설 신재생에너지 보급사업 추진계획

기후환경본부

(녹색에너지과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 ■	(	산업통상자원부	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	12개자치구	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	서울시립대등11개소	)		무 □

‘14년 공공시설 신재생에너지 보급사업 추진계획

2014년 시 산하 및 자치구 공공시설을 대상으로 태양광 등

신재생에너지 보급 확대를 위한 지원사업을 추진하고자 함.

Ⅰ				사업 개요		‘

○ 사업대상(3) : 국비지원사업, 시자체사업, 임대아파트 태양광 보급사업

- 시 및 사업소, 자치구 공공시설, 서울시 재개발 임대아파트

○ 지원기준

- 국비지원사업 : 시 및 사업소(국비 50, 시비 50), 자치구(국비 50, 시비 중 일부 자치구 부담)

- 시자체사업 : 시 및 사업소(전액 시비), 자치구(시비 중 일부 자치구 부담)

- 임대아파트 : SH공사가 관리하는 서울시 소유 재개발 임대 아파트(전액 시비)

※ 자치구 부담기준 : 자치구 재정력에 따라 차등지원(30~70%)

Ⅱ				그간의 추진현황		‘

□ 총 지원실적

○ ‘06~’13년 : 총 308건,  68,480백만원 지원

- 지역지원사업 125건, 시자체 152건, 임대아파트 31건 보급

- 에너지원별 : 태양광 7,008kW, 태양열 4,846㎡, 지열 2,480RT, 집광채광 8,910㎡, 소수력 300kW

(단위:백만원)

년도	계	‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13
건수	308	2	8	47	61	89	28	34	39
금액	68,480	2,980	4,199	14,007	19,194	13,660	3,642	4,379	6,419

※ ‘13년 태양광 825kW, 태양열 250㎡, 지열 18RT, 소수력 300kW

□ 그간의 성과

○ 연간 신재생에너지 2,740TOE 생산, 온실가스 23,450톤 감축

○ 공공시설을 활용한 신재생에너지원 다원화 및 선행 보급 효과

○ 임대아파트 태양광 보급으로 승강기, 지하주차장 조명등 단지 내 공용부하 전력공급 에너지 복지증진에 기여

Ⅲ				2014년 추진계획		‘

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014. 1월 ~12월

○ 총 사업비 : 2,532백만원

- 국비지원사업 : 1,260백만원(국비 738, 시비 522)

- 시자체사업 : 826백만원(시비)

- 임대아파트 : 446백만원(시비)

○ 추진방법

- 사업추진기관(부서)에서 계약체결 및 태양광 설치추진

- 태양광 설치기준 가이드라인 제시 및 추진 진행상황 관리

□ 세부추진계획

1

국비지원사업(국비 50%매칭)

○ 대 상 : 서울시립대학교 등 16개(별첨 참고)

○ 규 모 : 태양광 15개 235kW, 지열 1개 350kW

○ 사업비 : 1,260백만원(국비 738, 시비 522)

○ 추진방법

- 국비지원사업 수요조사 및 내부심사 : ‘13.4월~

- 산업부 국비지원사업 평가 및 심의확정 : ‘13.10월~

2

시 자체 보급사업

○ 대    상 : 소방방재본부 산하 119안전센터 등 15개소(별첨 참조)

○ 규    모 : 태양광 15개(시 산하 15, 자치구 5) 162kW

○ 사 업 비 : 675백만원(전액 시비)

○ 추진방법

- 사업대상 수요조사(공모)     : ‘13.12월

- 사업계획서 검토 및 심사선정 : ‘14.1월

※ 자치구 시설은 구비 확보한 자치구 선정(5개)

3

임대아파트 태양광 보급사업

○ 대    상 : 4개 단지(독립문극동, 상도건영, 서대문센트레빌, 하계학여울청구)

○ 규    모 : 총 80kW (단지별 20kW)

○ 사 업 비 : 352백만원(전액 시비)

○ 추진사항

- 임대아파트 수요조사          : ‘13.12월

- 입주민 동의 및 대상단지 선정 : ‘14.1월

□ 향후계획

○ 태양광 통합 모니터링시스템 연계 관리기준 시달 및 예산 배정

○ 시자체 사업비 잔액(151백만원), 임대아파트 잔액(94백만원)은 추후 사업대상 선정 후 추진

○ 사업예산 조기 집행토록 추진사항 및 실적 관리(매월)

붙임  ‘14년 보급대상 목록(국비지원, 시자체, 임대아파트) 각 1부.  끝.