함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	변경계약 의뢰(구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사 건설폐기물 처리용역)

1. 우리본부에서 시행중인 “구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 건설폐기물처리용역”에 대하여 아래와 같이 변경계약(최종) 의뢰 합니다.

가. 용 역 명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

건설폐기물처리용역(추가발주분)

나. 용역개요 : 폐아스콘 3,461톤, 폐콘크리트 37,280톤, 혼합폐기물 5,379톤

다. 용역기간

- 총   차   분 : 2012.04.10. ~ 2015. 4.20.

- 3차분(금차) : 2014.02.04. ~ 2015. 4.20.

라. 계 약 자 : 대길환경㈜  대표 조정기

마. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

바. 변경사유 : 현장여건 변동에 따른 폐기물 성상 및 수량 변동

사. 설계변경 내역

구 분	총괄분		3차분(금차)		증‧감
	당초	변경	당초	변경
용역비(원)	655,066,700	516,560,000	372,456,170	233,949,470	감)138,506,700
용역기간	'12.04.10. ~ '15.04.20.		'14.02.04. ~ '15.04.20.		변동없음

붙임 : 1. 시행 품의서 1부.

2. 건설폐기물 처리용역 정산변경 실정보고 검토서 1부.

3. 실정보고 및 내역서 1부.

4. 합의서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	라승보		고도정수반장	김인규		시설안전부장	전결 04/16 강신재
협조자
시행	고도정수반-2302	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1456	/전송	3146-1529	/	raseoungbo@seoul.go.kr	/	대시민공개