문서번호	조경과-796
결재일자	2014.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
오맹렬	김흔진	이성주	정상택		02/19 안영노
협 조

″지속 가능한 건강한 도시숲 조성 등을 위한″

토착수종 및 도시숲 복원사업 추진계획

2014. 2.

서 울 대 공 원

(조경과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

″지속가능한 건강한 도시숲 조성 등을 위한″

토착 수종 및 도시숲 복원사업추진계획

서울대공원 산림욕장 저수지 주변 아까시아 군락지 생육환경개선 등을 위한 토착수종 및 도시숲 복원사업을 시행하여 산림재해를 예방하고 쾌적한 공원환경을 조성코자함

Ⅰ		추진근거

▢ 서울시 2014년 토착수종식재 및 도시숲복원사업 추진계획 알림

(자연생태과-1564, 2014.1.28.)

Ⅱ		사업개요

▢ 기   간  : 2014. 03 ~ 2014 . 5. 30

▢ 대 상 지 : 막계동 산65-103번지 일대(산림욕장)

▢ 사업내용 : 임내정비, 토착수종식재, 작업로설치 등

▢ 소요예산  : 100,000천원(설계비 7,000  공사비 93,000)

Ⅲ		추진경과

▢ 외부전문가 자문위원단 구성 및 운영

○ 2014.02.11 : 외부전문가 자문단 구성완료

※ 산악트레킹 및 숲해설가 등 전문가 3명 선임

Ⅳ		발주방법

▢ 실시설계용역 : 수의계약(소액)

○ 설계용역비 : 7,000천원

○ 대    상  : 산림분야 기술사사무소 또는 엔지니어링업체

○  관계법규

- 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제27조

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률 시행령 제25조

▢ 공사발주 : 공개경쟁입찰

○ 공 사 비 : 93,000천원

○ 공사종류 : 산림사업

○ 대   상  : 산림사업법인, 산림조합중앙회, 산림조합

○  관계법규

- 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제27조

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률 시행령 제20조

Ⅳ		추진계획

○ 2014.02.20 : 설계용역 타당성심사 의뢰(市 기술심사담당관)

○ 2014.02.26 : 설계용역 발주

○ 2014.02.26.~28 : 1차 전문가 자문회의 개최

○ 2014.03.03 : 용역 착수

○ 2014.03.20 : 제2차 전문가 자문회의 개최

○ 2014.03.30 : 용역준공

○ 2014.04.01 : 설계심의 의뢰

○ 2014.04.09 : 공사발주

○ 2014.05.30 : 공사준공

Ⅴ		기대효과

○ 산림재해 예방 및 건전한 산림환경조성.

붙 임 : 사업현황지 사진 1부. 끝.