문서번호	하천관리과-6079
결재일자	2015.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장	물순환기획관
김희송	구자훈	정중곤	04/16 김학진

“한남빗물펌프장외 2개소 배수시설 성능향샹 기본 및 실시설계용역”

준공기한 연기 검토보고

2015. 4.

도시안전본부

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

“한남빗물펌프장외 2개소 배수시설 성능향샹 기본 및 실시설계용역”

준공기한 연기 검토보고

■ 용역개요

○ 용 역 명 : 한남빗물펌프장외 2개소 배수시설 성능향상 기본 및 실시설계용역

○ 과업내용 : 한남, 탄천, 잠원빗물펌프장 성능향상

○ 계약기간 : 2014. 6. 24 ~ 2015. 4. 19.

○ 계약금액 : 279,406,000원

■ 준공기한 연기 검토

○ 관련사업 검토내용 반영을 위한 절대 공기부족

- 관련 사업인 “잠원2 빗물펌프장 신설사업”이 인근 주민들의 설치 반대 민원으로 인해 공사 중지되어 대안 검토 중에 있어,

- 검토 변경 사항을 본 과업 대상인 “잠원빗물펌프장” 성능향상

계획에 반영키 위한 절대공기 부족

■ 변경내용

○ 준공기한

- 당   초 : 2014. 06. 24. ~ 2015. 04. 19.

- 변   경 : 2014. 06. 24. ~ 2015. 10. 19.

○ 계약금액 : 변경없음.

○ 귀책사유 : 서울특별시

○ 지체상금 : 미부과

■ 조치의견

○ 과업수행에 차질이 없도록 위와같이 준공기한 연기코자 함.  끝.

붙임 : 준공기한 연기요청 공문 1부.  끝.