문서번호	토목부-7834
결재일자	2015.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
남덕희		이동훈	04/16 노우성
협조
	주무관		장종환

-동부간선도로 확장공사(3공구)-

킥오프미팅결과 조치계획 보고

2015. 4.

도시기반시설본부

(토목부)

-동부간선도로 확장공사(3공구)-

킥오프미팅결과 조치계획

□ 개최개요

○ 일  시 : 2015. 4. 7.(화) 15:00』

○ 장  소 : 동부간선도로확장공사(3공구) 상황실

○ 참석자

- 서 울 시 : 교량건설과장 외 주무관

- 용역업체 : 책임건설사업관리기술자 및 기술지원감리원, 현장대리인, ㈜동일기술공사, 제일엔지니어링, 협력업체』

□ 검토 안건 및 조치계획

검토안건	조치계획	비고
○ 본부 안전점검 시(2015. 3.31.)지적사항에 대한 검토 - Sheet pile 가시설 Earth-anchor 간격 검토	어스앵커 간격을 2.0m에서 1.6m로 변경완료
○ 노원교 연결램프 및 수락고가 설계 도서 부분 납품요구 - 노원교 연결램프 철거완료 및 노원교 하류 Sheet pile 항타 완료 - 강관 pile 제원, 켄틸레버 구체 및 교각설계 도면이 있어야 강관 pile 구매 및 시공이 가능함	책임감리단 및 시공사에 납품 조치완료(4.13.까지)
○ 수락고가 방음벽 제내지 측 연석상태 점검 - 연석이 노후 되어 보수, 보강 등이 필요한 것으로 사료됨 ※ 현 설계 : 연석에 케미컬 앙카 설치 후 4m 방음벽 설치	연석 보수에 대한 감리단 실정보고 후 조치
○ 장암지하차도 세라믹 도장 - 구조물 시공완료 2년 경과 후 표면처리 및 도장을 시행하게 되나 2년 정도 방치 시 부식정도가 심할 것으로 사료되므로 바탕처리 후 하도 등 조치 필요여부 ※ 현 설계 : Sheet pile 면 정리 후 Sheet pile 연결 후 용접 ※ 세라믹도장 : 면 처리 → 성형 → 도장	장시간 방치로 부식이 침투되지 않도록세라믹 도장을 포함하여 장수명 도장, 증방식 도장 등을 비교검토하여 최적안 선정

끝.