문서번호	조경과-2059
결재일자	2015.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	주무관		조경과장		관리부장
조진성	윤희숙		이성주		04/16 심상원
협 조

「생활공원 조성공사」실정검토 검토보고

2015. 4.

서울대공원

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「생활공원 조성공사」 실정사항 검토보고

「생활공원 조성공사」 추진과 관련 현안사항에 대하여 검토하고 아래와 같이 조치하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 생활공원 조성공사

○ 공사기간 : 2014. 12. 18 ~ 2015. 5. 6

○ 공사내용 : 휴식시설 설치, 숲길 정비, 수목식재 등

○ 총공사비 : 318,058,000원 (도급액 211,780,000원, 관급비 106,278,000원)

○ 도급업체 : 원하종합건설(주) 최영숙

□ 변경내용검토

1) 주요 변경사유 및 내용

○ 경사도 등 현황에 따라 산책로 및 진입로 동선 변경

- 동선변경에 따라 야생화 식재지 조정, 산책로변 왕벚나무 추가식재 반영

○ 경관을 고려하여 대상지내 고사목, 지장목 추가제거 및 산책로변 솎아베기

○ 조망포인트를 조성하여 의자 설치(당초 전망데크는 제외), 휴게데크(책 읽는 마루)는 호수정 뒤편 소나무림으로 위치 변경

○ 호수정 뒤편 유휴지는 잔디 및 초화류 식재하여 경관향상 도모

2) 설계변경금액 및 처리방안

○ 공사비 증액 없이 도급비 범위내에서 공종 및 물량, 및 식재 위치 등 조정하여 처리

□ 보고자의견

○ 위 보고한 바와 같이 공사여건이 변경되어 설계변경 대상이나 사업의 시급성을 감안 우선 시공토록 조치하고 추후 설계변경 처리하고자 함

붙임 : 위치도 1부.  끝.