문서번호	급수운영과-6752
결재일자	2015.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		급수운영과장
이승우		04/17 최임봉
협 조

2015년도 강남구관내 상수도시설물설치 및 보수공사(장기계속) 발주계획 보고

2015. 4.

강남수도사업소(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

2015년 강남구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사 발주계획 보고

배수지 ․ 가압장 시설물 유지관리 및 노후밸브 정비를 위한 상수도공사를 발주하여 최적의 시설물 관리상태 유지에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		공사개요

□ 공사명 : 2015년 강남구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속 단가계약)

□ 공사개요

- 노후밸브 정비 146개소, 불량맨홀 설치및보수 249개소

- 가압장 ․ 배수지 등 시설물 유지관리 16개소

□ 공사기간 : 착공일로부터 2016.04.30일 까지

□ 예산현황 : 1,030,000천원

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(노후밸브)   : 890,000천원

- 상수도사업비,영업비용,배급수비,기타교체비(시설물) : 140,000천원

□ 발주현황

- 총 공 사 비 : 1,030,000,000원

- 도  급  비  :  483,564,000원

- 관  급  비  :  133,700,000원

- 기타 이설비 :  412,736,000원

□ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제24․25조(단가계약)

- 본부장방침 : 경리과-2125(2006. 3.17)

- 사업 일상감사 결과통보 안전감사담당관–3775(2015. 3. 3)

- 사업 계약심사 결과통보 계약심사과–6955(2015. 4. 14)

Ⅱ		계약심사 결과

□ 관련근거 : 계약심사과-6955(2015. 4.14.) 계약심사 결과통보

□ 주요 심사 내용

○ 자재단가 조정

- 유류가격조정((2015년 4월기준)

‣ 휘발유 1,402.1원→1,448.608원/L, 경유 1,258.5원/L→1,284.74원/L

- 각재(외송) 407,286원/㎥ → 369,000원/㎥ 등 9종

○ 내역서 및 일위대가 수정

- 내역서

‣ 부대공 : 관로표시못 설치공 등 11공종 물량 수정(물량산출서 기준)

- 일위대가

‣ (단산) 터파기(기계100%)불량 : 지세할증 15%제외

‣ 몰탈-보통인부 0.66인 → 0.429인

‣ 철근현장조립 : 6.5kg → 5kg

- 중기사용료

‣ 진동 로울러0.7ton(핸드가이드식) :  건설기계운전사→일반기계운전사

□ 심사 결과

(단위 : 천원)

사업명	예산액	심사요청액	심사금액	감 액	비고
시설물공사	1,030,000	500,000	483,564	16,436

Ⅲ		공사 계획

□ 추진경과 (설계내역 작성 및 설계심사)

설계서 작성(2015. 3~4월 초)			․ ‘14년 발주하여 시행중인 장기계속 단가계약 공사의 계약기간 만료.(’15. 4.30) ․ 3년 평균물량 산출하여 설계내역 작성
	□
			․ 심사의뢰 : 본청 계약심사과 의뢰 - 관련대호 : 시설관리과-6159(4.9) - 심사요청 금액(도급액) : 500,000천원
공사설계 심사의뢰(본청)
	□
			․ 관련대호 : 계약심사과-6955 결과 통보 ․ 심사결과 금액 : 483,564천원(감16,436천원)
심사결과 통보

□ 추진일정

□ 본청 계약심사과 의뢰  : 2015. 4. 17 (사업소 → 본청 계약심사과)

□ 공사 발주 및 계약의뢰  : 2015. 4. 20 (사업소 → 본청 재무과)

□ 일반공고 및 계약  : 2015. 4. 20 ~ 5.8 (본청 계약기간 : 18일)

□ 공 사 착 공 : 2015. 5. 10.

Ⅳ		향후추진계획

□ 입찰 및 계약

- 입찰은 총 예정수량을 기준으로 표시

- 경제활력을 위한 균형집행 추진계획에 의거 긴급공고 실시

- 2015년도 (1차년도) 계약체결은 당해연도에 이행할 금액과 총부기 금액을 계약서에 명기하여 계약을 체결하고,

- 2016년도(2차년도)분은 부기한 총금액에서 1차년도 계약분을 제외한 나머지 금액에 대하여 계약체결

(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제24조)

□ 계약기간(총 부기기간) : 착공일로부터 2016. 4.30일 까지

□ 1차년도 : 착공일 ~ 2015.12.31까지

□ 2차년도 : 2016. 1. 1 ~ 2016. 4. 30

Ⅴ		기타 행정사항

□ 본청 안전감사담당관에서 일상감사 결과에 의거 본청 계약심사과로 계약심사의뢰 결과에 의거 변경된 사항으로 적용하여 발주코자 함.

□ 긴급입찰 시행하여 절차를 단축하고, 체계적인 집행계획에 의한 실적       관리로 경제활력제고 및 2015년 시설물 상수도공사(장기계속 단가계약)       업무에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1) 관련공문(계약심사 결과) 1부.

2) 설계내역서 1부.

3) 공사시방서 및 설명서 1부.  끝.