	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건축부장
(경유)
제 목	변경계약체결통보(국세청 남대문별관 석면 해체제거 처리용역)

1. 건축부-4256(2015.4.14.)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 사업 계약건에 대하여 아래와 같이 변경계약 체결하였음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가.  계약건명 : 국세청 남대문별관 석면 해체제거 처리 용역

나. 변경사항 : 기간변경

다. 변경계약 체결현황

구 분	당 초	변경후	비 고
계 약 자	아이엔지환경개발㈜ 외 2	*******
계약금액	금20,770,000원	*******
용역기간	2015.03.17. ~ 2015.04.16.	2015.03.17. ~ 2015.05.06.

붙 임 : 변경계약서 1부.  끝.

	건설총괄부장
주무관	김정희A		경리과장	04/17 代김용범
협조자
시행	건설총괄부-7675	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어플레이스빌딩 11층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2371	/전송	02-3708-2365	/	quilt2004@seoul.go.kr	/	부분공개(5)