문서번호	토목부-7955
결재일자	2015.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
정문수		이승우	전결 04/17 노우성
협조

준 공 기 한 연 기  보 고

(노원교 연결램프 설치 및 수락고가 확장 기본 및 실시설계 감리용역)

2015. 4.

서울특별시도시기반시설본부

( 토  목  부 )

준 공 기 한 연 기  보 고

(노원교 연결램프 설치 및 수락고가 확장 기본 및 실시설계 감리용역)

현재 시행 중인 “노원교 연결램프 설치 및 수락고가 확장 기본 및 실시설계” 설계감리용역의 준공기한을 연장하고자 보고하는 내용임.

※ 준공기한 연기 현황 : 2015. 4.28 → 2015. 6.29 (증62일)

▢ 용역 현황

◦ 용 역 명 : 노원교 연결램프 설치 및 수락고가 확장 기본 및 실시설계 감리용역

◦ 위    치 : 노원구 상계동 수락고가 주변 (상계동 1101-2번지 ~ 상계동 1256번지)

◦ 규    모

- 도로확장 : 폭4차로 → 6차로, 연장620m

∘수락고가 확장 : 폭21m(4차로), 연장300m → 폭24.74m(6차로), 연장300m

- 노원교 연결램프 설치 : 폭5.25m, 연장143m

◦ 계약기간 : 2014. 4. 4. ~ 2015. 4.28.

◦ 계약금액 : 92,205,000원

◦ 계 약 자 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소   최 태 희

▢ 근    거 : 토목부-5460호(2015. 3.18.)로 설계용역 준공기한 연기 보고

제일 제15-782호(2015. 4.15.)로 과업기간 연기 요청

▢ 준공기한 연기사유

◦ 기본 및 실시설계의 과업기간 연장에 따른 설계감리기간 연장

- 수락고가차도 방음벽 설치를 위한 폭원(폭23.75m→ 24.74m) 변경에 따른 설계자문회의(′15. 3.13.) 수행으로 설계기간 연장

※ 설계 용역기간 : ′14. 3.27 ~ ′15. 5.30

◦ 건설기술심의(설계심의, ′15. 5.12.) 완료 후 준공도서 검토 등 설계용역 준공에 따른 행정절차 수행을 위한 과업기간 부족

▢ 설계변경 내역

◦ 용역비 및 준공기한 내역

구 분	당 초	변 경	증 / 감	비고
용 역 비	92,205,000	92,205,000	변경없음
준공기한	′14. 4. 4.~′15. 4.28.	′14. 4. 4.~′15. 6.29.	증)62일

- 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치의견

◦ ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소로부터 제출된 준공기한 연기 요청을 검토한 바 보다 양질의 설계 성과품이 납품될 수 있도록 “노원교 연결램프 설치 및 수락고가 확장 기본 및 실시설계” 설계감리용역의 준공기한을 연기 설계감리용역업무에 만전을 기하도록 조치코자 합니다.

붙  임 : 1. 설계용역 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 연기요청 공문 1부.

3. 예정공정표(변경) 1부.  끝.