문서번호	토목부-8008
결재일자	2015.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
조현형		권혁대	04/17 노우성
협조
	주무관		강철규

“응봉교 확장 및 성능개선공사”

콘크리트 품질 확보를 위한 시공이음부 면정리

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4.

도시기반시설본부

(토목부)

콘크리트 품질 확보를 위한 시공이음부 면정리

【 응봉교 확장 및 성능개선 공사】

터널형방음벽 기초부에 대한 단면처리로 콘크리트 부착강도 등 품질을 확보하고자 검토보고 드림.

관련근거

○ 응봉감 제2015-109호(2015. 4.10.) : 실정보고(시점부 왕십리방향 터널형 방음벽 기초연결부 단면처리)제출

공사개요

○ 공 사 명 : 응봉교 확장 및 성능개선 공사

○ 공사위치 : 성동구 응봉동 ~ 성수동(기존 응봉교 구간)

○ 공사규모 : 응봉교 확장 및 성능개선

- 왕복 4차로 → 6차로, 연장 693m(교량 625m, 옹벽 68m)

- 성능개선 : DB18 → DB24

○ 공사기간 : 2008.10. ~ 2015.12.

○ 도 급 비 : 738억원

○ 시 공 사 : 한신공영(주) 외1

○ 감 리 사 : ㈜건화 외1

○ 설 계 사 : 제일엔지니어링 외 1

감리 실정보고 내용

○ 시점부 1SPAN 왕십리방향 터널형 방음벽 기초 시공을 위해 교통우회용으로 이용된 기존 포장면에 대하여 단면처리[아스콘 깨기+시공이음 면정리] 후 터널형 방음벽 기초를 시공하여 품질확보토록 조치함이 타당하다고 사료됨.

- 터널형 방음벽 기초 연결부 단면처리구간

○ 수량 변경 현황

구 분	규 격	단위	수 량		증·감	비고
			당초	변경
기초 연결부 단면처리
1) 아스팔트포장 깨기	T=30cm미만	㎥	-	7.7	증) 7.7
2) 시공이음 면정리	콘크리트 치핑	㎡	-	193.4	증)193.4
3) 아스콘포장 절단		m	-	552.6	증)522.6
4) 폐기물 상차 및 처리	폐아스콘	ton	-	18	증) 18

○ 공사비 증감현황

(단위:천원, VAT포함)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
공사비	도급공사비	-	6,897	증) 6,897
	폐기물처리비	-	311	증) 311
총 계		-	7,208	증) 7,208

○ 단가 적용

- 산출단가 : 실적공사비 적용(최저가 낙찰제 공사)

※ 공사계약 일반조건 제20조 3항에 의거 설계변경 당시를 기준으로 산정한 실적공사비 단가적용

조치의견

○ 감리단 의견과 같이 터널형 방음벽 기초부에 대한 단면처리후 시공토록 하여 콘크리트 부착강도 등 품질을 확보하고 추후 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 감리의견서 사본 1부.  끝.