투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업(총차)』 준공기한 연기요청

1. 우리본부에서 장기계속사업으로 시행중인 『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』의 총차 공사기간을 아래와 같이 변경코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업(총차)

나. 공사규모 : 고도처리시설개량 127만톤/일, 시설현대화 36만톤/일

다. 계약금액 : 284,423백만원

라. 공사기간 : 2009.11.09 ~ 2015.08.09 (총공사 2,100일)

마. 시 공 사 : 대림산업(주) 외 5개사

바. 공사기간 연기

차수	구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비고
총괄	공사기간	2009.11.09 ~ 2015.08.09	2009.11.09 ~ 2016.02.28	증) 203일
	도 급 비	284,423,000,000원	좌동	-

붙임 : 총차공사 준공기한 연기 검토 보고서 1부. 끝.

	방재시설부장
주무관	김상용		환경시설과장	윤방식		방재시설부장	04/17 代이도헌
협조자	경리과장	代김용범
시행	방재시설부-5160	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/
전화	02)3708-8782	/전송	02)3708-8756	/	kimsy2405@seoul.go.kr	/	대시민공개