문서번호	시설과-2787
결재일자	2015.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
이동헌		이종한	04/17 이용태
협조
	주무관		남상국

용산가족공원 재정비사업 실정사항 보고

2015. 4.

중부공원녹지사업소

시설과

용산가족공원 재정비사업 실정사항 보고

용산가족공원 재정비사업 관련 현장실정사항을 보고드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 용산가족공원 재정비사업

○ 위    치 : 용산구 이태원로 60 등 용산가족공원 일대

○ 공사기간 : 2014. 12. 18 ~ 2015. 5. 16

○ 공사내용 : 연못순환설비 설치, 계류정비, 산책로 정비, 지피류식재 등

○ 도 급 자 : 새봄조경㈜ 대표 공지은

○ 도 급 비 : 157,447천원

□ 실정사항 검토내용

공 종	현황 및 실정사항	검토내용	비고
펌프 배관	하부연못에서 상부연못으로 물을 올리는 배관의 굴착노선 규모를 최소화하기 위한 위치변경 필요	배관굴착구간 위치변경 (도면참조)
연못 준설	연못바닥 준설물량 10㎥로 설계되어 있어 작업방법 강구 기존 연못물 배수비용 설계 미반영 연못 내 물고기 처리방안 필요	하부연못을 2개 부분으로 나눠서 배수작업 실시 준설계획 물량은 낙엽, 쓰레기 등 청소작업과 배수작업(장비사용)으로 대체조정 자체인력 활용 배수시 이동

□ 추진일정(안)

○ ‘15.04.17 ~ 05.05 : 배수, 설비공사

○ ‘15.04.20 ~ 05.05 : 계류공사(식재 등)

○ ‘15.05.06 ~ 05.15 : 산책로 포장공사

□ 보고의견

○ 굴착구간의 위치변경을 통해 녹지훼손을 최소화하고, 비용을 절감

○ 연못바닥의 생태계 보존 및 수질개선을 위해 인위적 준설을 최소화하고, 낙엽 등 오염원의 청소작업 위주로 준설작업을 시행하고자 함.

□ 처리계획도

텃밭

관리사무소

놀이터

연못

연못

계류

주차장

화장실

국립중앙박물관

공

원

경

계

1차배수

2차배수

변경관로계획

기존관로계획

펌

프

끝.