함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사)

우리본부에서 시행중인『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사』에 대하여 아래와 같이 (최종)설계변경 계약의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

나. 공사개요 : 재건설 25만톤/일, 고도정수처리시설 45만톤/일

다. 공사기간 : 총  차  분 : 2009.11.23. ~ 2015.04.20.

6차분(금차) : 2014.01.08. ~ 2015.04.20.

라. 계 약 자 : ㈜대우건설 대표 박영식 외 2개사

마. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비(시설비)

바. 설계변경 내역 및 사유

○ 설계변경 내역

- 총차분(전체분)

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
도급비	공 급 가 액	163,098,727,273	162,829,665,455	감) 269,061,818
	부가 가치세	16,309,872,727	16,282,966,545	감) 26,906,182
	계	179,408,600,000	179,112,632,000	감)295,968,000

- 6차분(금차분)

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
도급비	공 급 가 액	47,226,079,090	46,957,017,272	감) 269,061,818
	부가가치세	4,722,607,910	4,695,701,728	감) 26,906,182
	계	51,948,687,000	51,652,719,000	감) 295,968,000

○ 설계변경 사유

- 현장 변동에 따른 공사비 변경 : 대현산배수지 송수관 이중화 부설외 9건

- 간접비 및 폐기물 정산비용 반영

붙임 : 1. 설계변경 품의서 1부.

2. 감리사 설계변경 요청공문 1부.

3. 승인문서(계약금액 조정 심사결과) 각 1부.

4. 설계변경 내역서(총괄 8회, 6차 3회) 각 1부

5. 합의서 사본 1부. 끝.

	고도정수반장
주무관	라승보		고도정수반장	전결 04/20 김인규
협조자	주무관	송병욱
시행	고도정수반-2316	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1456	/전송	3146-1529	/	raseoungbo@seoul.go.kr	/	대시민공개