문서번호	시설과-2871
결재일자	2015.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
이동헌		남상국	04/20 이종한
협 조

용산가족공원 지하수 개발공사

설계변경 관련 전문가 자문 계획

2015. 4.

중부공원녹지사업소

시설과

용산가족공원 지하수 개발공사

설계변경 관련 전문가 자문 계획

용산가족공원 지하수 개발공사와 관련하여 설계변경 금액이 20% 이상으로 적정성 검토를 위해 전문가들의 자문을 실시하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 용산가족공원 지하수 개발공사

○ 공사기간 : ‘15. 4. 1 ~ 4. 27

○ 공사내용 : 착정공사, 모터설치, 상부보호장치 등

○ 도 급 자 : 평화지하개발㈜ 대표 김평화

○ 도 급 비 : 24,716천원

□ 자문계획

○ 일    자 : 2015. 4. 21(화) 14시

○ 자문위원 : 플러스파운틴(주) 김우진대표, 채움기술사사무소 김병채대표

○ 방    법 : 자문위원이 내역 등 현황자료 검토후 자문의견서 제출

○ 내    용 : 지하수 착정심도 조정에 따른 설계변경 내역 적정성

- 변경내역 : 24,716천원 → 32,100천원(7,384천원, 29.8% 증액)

○ 자문비 지급

- 소요예산 : 200천원 (위원 2명×100천원)

- 예산과목 : 남산및산하공원등유지관리, 사무관리비

○ 향후계획 : 자문의견을 검토하여 적정할 경우 설계변경 시행

첨부 : 변경내역서(안) 1부.  끝.