투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시인재개발원
수신	내부결재
(경유)
제목	배움관 기전실 바닥방수 및 창의관 화장실 배수구 조정공사 준공기한 연기

1. 『배움관 기전실 바닥방수 및 창의관 화장실 배수구 조정공사』의  과업수행 계약변경 사유가 발생하여 다음과 같이 준공기한을 연기하고자 합니다.

▣ 사업개요

가. 사 업 명 : 배움관 기전실 바닥방수 및 창의관 화장실 배수구 조정공사

나. 계 약 자 : 주) 신신체육건설 대표 오삼순

다. 계약금액 : 금 16,780,000원

라. 예산과목 : 인재원청사 보수□보강, 시설비(401-01)

마. 계 약 일 : 2015년 04월 16일

바. 착 수 일 : 2015년 04월 16일

사. 준 공 일 : 2015년 04월 20일

2. 위 사업의 준공기한을 아래와 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 연기준공기한 : 2015년 4월 27일

나. 지체상금 부과여부 : 미부과

다. 연기사유 : 준공기한의 착오기재로 당초 계약의 기한연장                                  사유발생.  끝.

주무관	남성준		시설재무팀장	김종엽		인재기획과장	04/20 박기용
협조자
시행	인재기획과-5144	(		)	접수		(		)
우	100-196	서울 중구 을지로6 재능빌딩 15층	/	http://hrd.seoul.go.kr
전화	3707-9781	/전송	3707-9789	/		/	대시민공개