과 장		04/20 홍숭희	심사자	시희식		설계자		박웅교	설 계		심 사		결 재
									2015년 4월 일		2015년 4월 일
변 경 설 계 내 역 서(5차 1회)
	용 역 명 : 강남순환 도시고속도로(4공구) 건설폐기물처리용역(5차) 당초/변경
	구 분				당 초 금 액		변 경 금 액			증·감		비 고
	총 용 역 비				250,000,000		250,000,000					내역변경
	용역비	공 급 가 액			227,272,728		227,272,728
		부 가 가 치 세			22,727,272		22,727,272
		계			250,000,000		250,000,000
용역개요 : - 폐콘크리트(톤) : 당초 4,973톤, 변경 5,453톤 증)480톤 - 폐아스콘(톤) : 당초 7,800톤, 변경 6,362톤 감)1,438톤 - 혼합폐기물(톤) : 당초 73톤, 변경 299톤 증)226톤 - 금속 및 철재류(톤) : 당초 9톤, 변경 9톤