문서번호	토목부-8047
결재일자	2015.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
장기철		서관석	04/20 노우성
협조
	주무관		오열상

북단IC 횡단배수관 변경설계 검토보고

《 월드컵대교 건설공사 》

2015. 4.

도시기반시설본부

(토 목 부)

북단IC 횡단배수관 변경설계 검토보고

《 월드컵대교 건설공사 》

공사현황

❍ 공사규모 : 폭 31.4m(6차로), 연장 1,980m

❍ 공사기간 : 2010. 3.22. ~ 2015. 8.22.

❍ 공 사 비 : 176,826백만원

❍ 시 공 사 : 삼성물산㈜ 외 2개사

❍ 감 리 단 : ㈜포스코엔지니어링 외 1개사

보고내용

❍ 관련근거 : 월드컵감리 2015-148호(2015. 4. 9.)

월드컵감리 2015-160호(2015. 4.16.)

❍ 월드컵대교 북단IC 공사구간 내 기존 횡단배수관과 신설 분류하수관 보호공 간섭으로 기존 횡단배수관을 철거하여야 하나, 철거 없이 기존 배수체계 유지가 가능한 것으로 잘못 설계되어 있어

❍ 원설계사에서 기존 횡단배수관 철거 후 횡단배수관 설치를 위한 최소한의 토피가 확보되는 곳으로 배수체계를 변경하는 보완설계를 제출하여 이에 대한 반영이 필요함

❍ 횡단배수관 변경설계 개요도

구 분	당초 설계	현 황
개요도	배수관로	분류하수관 보호공 배수관로
특 징	분류하수관 보호공에 대한 간섭을 누락 → 기존 배수관로 유지(설계오류)	분류하수관 보호공과 간섭발생 → 기존 배수관로 유지불가 → 변경설계

❍ 북단IC 배수관로 변경설계

강관(D600,3열) :22.24*3=66.72m 흄관(D1000) = 32.74m
A-LINE	범 례		기존배수관로
			변경배수관로
	추가수량	우수관	100M
		맨홀 및 집수정	3개소
B-LINE 강관(D800,2열)=12.8m B-LINE 흄관(D1200)=173.02m C-LINE 흄관(D800)=85.9m B-LINE 흄관(D1500)=7.1m
B,C-LINE	범 례		기존배수관로
			변경배수관로
	추가수량	우수관	279M
		맨홀 및 집수정	11개소

❍ 공사비 증·감 내역

(단위 : 천원)

구 분		규 격	단위	당 초		변 경		증 감		비고
				수량	금 액	수량	금 액	수량	금 액
도급공사비	1.강관부설	D600	M			67	12,304	67	12,304
		D800	M			13	3,151	13	3,151
	2.흄관부설	D1000	M			119	28,205	119	28,205
		D1200	M			173	55,439	173	55,439
		D1500	M			7	3,110	7	3,110
	3.맨홀설치	1.2*1.2	EA			9	13,180	9	13,180
	4.집수정설치	3열,2열	EA			5	8,112	5	8,112
	5.관보호공		식			1	19,199	1	19,199
	소 계						142,700		142,700
관 급 자 재 비							25,682		25,682
총 공 사 비							168,382		168,382

감리단 검토의견

❍ 월드컵대교 북단IC 분류하수관 보호공 신설로 인한 기존 횡단배수관로 간섭 구간은 원설계사의 설계도서를 바탕으로 내역 반영 후 북단 배수체계를 재확립하여 우기시 원활한 배수 안전성을 확보할 계획이며, 금회보고는 터파기 및 되메우기 수량은 미포함 하였으며, 차후 북단 토공변경시 일괄 변경예정임

조치계획

❍ 북단IC 횡단배수관 변경설계 실정보고에 대하여 내용을 검토한 바, 설계오류에 따른 원설계사의 보완설계가 타당하기에 우선 시공토록 업무지시하고 향후 설계변경하여 반영코자 함.

붙  임 : 감리단 공문 1부.  끝.