문서번호	방재시설부-5195
결재일자	2015.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	04/20 임춘근
협조
	주무관		고소영

『경춘선 폐선부지 공원조성공사』

신규공종 강제협의율 검토 보고

2015. 04

도시기반시설본부

방재시설부

『경춘선 폐선부지 공원조성공사』

신규공종 강제협의율 검토 보고

「경춘선 폐선부지 공원조성공사」 화랑대로변 기존옹벽 상·하단 배수로

정비 실정보고와 관련한 강제협의율 검토 보고임.

▶ 관련근거 : 경의경춘(감) 제2015–348(2015.04.16)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성공사(1단계)

○ 위    치 : 노원구 공릉동 공덕제2철도건널목 ~ 육사삼거리

○ 규    모 : 공원조성 연장(L)=1.90km, 면적(A)=48,170㎡

○ 사업기간 : 2013.10.10. ~ 2015.5.15

○ 공 사 비 : 6,044백만원

Ⅱ

보고내용

○ 화랑대로변 기존옹벽 상·하단 배수로 정비 실정보고와 관련, 신규공종에     대해 낙찰율로 조정 협의 중이었으나 원만히 해결되지 않았으며,

○ 건설기술관리단으로부터 실정보고 승인 지연에 따른 임금체불 민원 등의      사유로 협의율 조정(확정) 요청 공문이 접수된 상황임.

Ⅲ

검토내용

○ 신규 공종에 대한 협의율 적용과 관련하여 시공사에 신규 공종에 대하여 낙찰율 적용 권고하였으나, 공사장 여건이 폭이 좁은 긴 선형공원으로 작업환경이 불량하여 단가부분에서 손해가 커 낙찰율 적용은 불가하는 것이 시공사의 입장이며,

○ 발주처의 요구에 의한 설계변경 시 협의가 이루어지지 않을 경우 강제협의율을 적용하도록 규정하고 있으므로 화랑대로변 기존옹벽 상·하단 배수로 정비공사 신규공종에 대하여 강제협의율 적용을 수용코자함.

붙임 : 실정보고 및 회신공문 각 1부.  끝.