설계변경 심의 의견서

대시민공개

1. 용역명 : 명일동309-1~상일동121-1간외 1개소 송배수관 정비공사

교통소통대책 수립용역

신청부서명	급수운영과
작 성 자	이 덕 규
제 출 일	2015. 04. 21

2. 심의 위원회 의견

- 심의일시 : 2015. 04. 21(화)

- 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 아래와 같이	의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

급수운영과장

전명수

04/21

전명수

타당함

위    원

주무관

이경재

이경재

타당함

위    원

주무관

김용현

김용현

타당함

위    원

주무관

임인택

임인택

타당함

위    원

주무관

김주경

김주경

타당함

위    원

주무관

권기섭

권기섭

타당함

담    당

주무관

이덕규

이덕규

설계 변경 심의 설명서

용역현황

용 역 명 : 명일동 309-1~상일동 121-1간외 1개소 송배수관 정비공사 교통소통대책 수립용역

계약기간 : 2015.02.12. ~ 2015.04.23.

계약상대자 : ㈜도시미래종합기술공사  대표 이강제

계약금액 : 22,344,120원

보고내용

위 용역 시행중 명일동309-1~상일동121-1 송배수관 정비공사구간은 서울특별시 교통대책자문회의결과 조건부 시행으로 통과 되었으나,

마천동5~거마가압장간 송배수관 정비공사구간(거마로)은 송파구청 도로과 2015년도 상반기 도로관리심의회 개최결과 구도로 확인되어, 송파구청 교통소통대책자문회의를 거쳐야 함.

송파구청 교통소통대책 자문회의를 통과하기 위해서 별도 용역보고서를 작성하여 구청 교통자문회의를 참석하여야 하므로 계약금액 증가가 불가피하고,

마천동5~거마가압장간 송배수관 정비공사 실시설계용역의 성내복개천 추진구간 노선결정이 최근 결정되어, 교통용역보고서를 작성하여 송파구청 교통소통대책자문회의를 통과 하기 위하여는 준공기한 연기가 필요함.

의견

위와 같은 사항으로 아래와 같이 설계변경(계약금액조정) 및 준공기한 연기를 시행하고자 함.

- 계약금액

○ 당 초 : 22,344,120원

○ 변 경 : 26,951,100원(증4,606,980원)

- 준공기한 연기

○ 당 초 : 2015.02.12. ~ 2015.04.23.

○ 변 경 : 2015.02.12. ~ 2015.05.29.

붙  임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 설계변경 및 준공기한 연기보고서 1부.  끝.