투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	에이스톤엔지니어링(주) 대표 장명학 귀하
(경유)
제목	사천교 확장 기본 및 실시설계용역 추가 과업지시

1. 귀 사의 무궁한 발전과 번영을 기원합니다.

2. 귀 사와 우리 사업소간 계약 체결하여 시행중인 「사천교 확장 기본 및 실시설계용역」과 관련하여 관계부서 검토보고회(2015.04.03.) 시 논의된 ‘사천교의 현 상태에 대한 추가조사 필요’사항에 대하여 다음과 같이 추가 과업지시하오니 조속한 시일 내 추가과업을 시행하고 결과를 설계용역에 반영 검토하시기 바라며, 추가과업에 소요되는 비용은 추후 설계변경 시 정산코자 합니다.

-- 다  음 --

○ 추가 과업지시 내용

- 사천교 기존 교량의 Slab 내하력 및 Coping 상태, 취약부위 등 정확한 물성치 자료 추가 조사를 위한 정밀안전진단 수준 점검 시행

※ 추가과업에 대한 수행계획서 제출 후 시행하시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	이동섭		주무관	김지환		시설보수과장	04/21 신동헌
협조자
시행	시설보수과-3515	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울 마포구 상암동 1732	/
전화	02-300-8374	/전송	02-300-8384	/	lds0420@seoul.go.kr	/	대시민공개