문서번호	급수운영과-5868
결재일자	2015.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장	강동수도사업소장
이덕규	이경재	전명수	04/21 원응연
협 조

준공기한 연기 검토보고

2015. 4.

강동수도사업소

(급수운영과)

준공기한 연기 검토 보고

우리사업소에서 시행중인 『마천동5~거마가압장간 송배수관 정비공사 실시설계용역』의 준공기한 연기사항이 있어 이를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

용역현황

용 역 명 : 마천동5~거마가압장간 송배수관 정비공사 실시설계용역

용역개요 : D=1000㎜, L=400m 실시설계 용역(성내천 횡단포함)

용역기간 : 2015.02.23. ~ 2015.04.23

계약상대자 : ㈜유경기술단   대표 김석천

계약금액 : 22,639,700원

보고내용

위 용역을 2월에 발주하여 4월 23일 완료예정이었으나, 배수과-1389(2015.3.4.)호로 설계용역 준공 전 배수과 검토를 요청할 것을 본부 배수과에서 지시함.

용역구간중 성내 복개천 추진구간이 있어 추진공법 등에 대한 본부 검토 후 검토내용을 설계에 반영하기 위해서는 준공기한 연기가 불가피함.

보고자의견

위와 같은 사항으로 용역 준공기한을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

- 준공기한 연기

○ 당 초 : 2015.02.23. ~ 2015.04.23.

○ 변 경 : 2015.02.23. ~ 2015.05.14.

첨부 : 관련공문 1부.  끝.