문서번호	도로보수과-1618
결재일자	2015.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
윤동원		국중진	04/21 이종엽
협조

'15년 불량맨홀 정비대상 전수조사 추진사항 보고

2014.  4.   .

·

‘15년 불량맨홀 정비대상

전수조사 추진사항 보고

관내 특별시도상 불량맨홀(주변부 포장 파손 포함)이 곳곳에 누적되어 차량이용 시민들에 대한 불편을 주고 있어 전수조사를 실시하고 2015년도 맨홀정비공사 계약과 동시에 불량맨홀을 신속하게 정비하여 시민불편이 저감될 수 있도록 조치하고자 함

□ 관련근거

○ 도로관리과-2459(2014.2.14)호 : 맨홀정비공사 품질향상 방안 통보

○ 도로관리과-6314(2015.4.17)호 : 도로 균열 조사 및 정비 철저

□ 2015년 불량맨홀 정비대상 조사 현황 및 계획

○ 조사기간

- 1차 조사 : 2015. 3. 31. ~ 2015. 4. 10.(11일간)

- 2차 조사 : 2015. 4. 27. ~ 2015. 5. 01.(5일간)

○ 점검조(2개조) 편성 운영

계	A조	B조	비고
2개조 (10인)	-점검구간 : 성동구, 광진구 -점검자: 홍수종, 윤동원, 정원근 -안전요원: 기동반 2명	-점검구간 : 동대문구, 중랑구 -점검자: 이기영, 하승환, 박성민 -안전원: 기동반 2명

□ 2015년 불량맨홀 정비대상 조사결과(1차)

○ 조사내용 : 8개노선 391개소

구 분	계	상수	하수	통신	전기	가스	기타
불량맨홀	391	60	135	159	13	17	7

○ 조사구간 : 광나루로, 동일로, 망우로, 왕산로, 아차산로, 고산자로, 뚝섬로, 강변역로

□ 1차 조사결과 조치계획

○ 사전협의 대상 : 15개기관 391개소

○ 사전협의 기간 : 2015.4.21. ~ 2015.5.6.

○ 적출된 불량맨홀에 대해서는 맨홀관리기관과의 사전협의를 거쳐 2015년 불량맨홀정비공사(연간단가) 발주․계약시 작업지시하여 정비

□ 2차 조사계획 및 조치계획

○ 조사기간 : 2015. 4. 27. ~ 2015. 5. 01.(5일간)

○ 조사구간 : 1차조사(8개노선) 구간 중 누락된 노선

○ 2차 조사계획 구간 점검 불량맨홀에 대해서는 맨홀관리기관 사전협의를 거쳐 2015년 불량맨홀정비공사(연간단가) 발주․계약시 작업지시예정

□ 기타 조치계획

○ 철개교체 및 맨홀뚜껑단차 정비대상에 대하여는 맨홀관리기관에 철개제공 요청

○ 철개확보가 어려울시 맨홀뚜껑 단차 조정공법 활용 자체정비토록 안내

붙임 : 1. 기관별 정비대상 목록 1부.

2. 기관별 정비대상 현황사진(별도첨부) 1부.

3. 맨홀뚜껑 단차조정공법 1부.  끝.