문서번호	도로보수과-4015
결재일자	2015.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
권세봉		이규철	04/22 임대성
협조
	주무관		이상하

도로옹벽 정밀점검용역 자문회의 개최계획

(녹사평대로 용산동2가 옹벽)

2015.  04. 21(화)

서부도로사업소

(도로보수과)

도로옹벽 정밀점검용역 자문회의 개최 계획

(녹사평대로 용산동2가 옹벽)

우리사업소에서 유지 관리하는 도로(옹벽)시설물(2종) 정밀점검 용역의 외관조사 및 상태평가 완료에 대한 자문회의를 개최하여 용역 수행에 만전을 기하고자 함.

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 도로옹벽(용산동2가) 정밀점검 용역

❍ 용역기간 : 2015. 03.03. ~ 2015. 05. 11.

❍ 용역금액 : 13,183천원

❍ 용 역 사 : ㈜청운구조안전연구원

❍ 용역대상 : 용산구 용산동2가(녹사평대로) 도로옹벽

□ 추진현황 (공정율 95%)

❍ 2015. 03. 03 : 용역 착수

❍ 2015. 03. 10 : 용역 착수보고

❍ 2015. 3~4월 : 외관조사 및 현장시험

❍ 2015. 04. 21 : 용역 중간보고

〈외관 정밀조사〉	〈중간보고〉

□ 자문회의 개최 계획

❍ 자문일시 : 2015. 04. 29(수) 14:00

❍ 장    소 : 서부도로사업소 2층 소회의실

❍ 자문위원 : 3명

연번	성 명	분야	소 속	비 고
1	고래건	토목	삼림엔지니어링	시설안전자문단
2	원용만	토목	한국건설품질연구원	시설안전자문단
3	천병식	토목	한양대 교수

❍ 보고방법 : 용역 책임기술자 PPT 발표

❍ 주요 보고내용

- 시설물 현황 및 용역 과업 추진사항 보고

- 시설물 외관조사, 재료시험, 내구성조사 결과 및 상태평가 보고 등

❍ 자문사항

- 용역보고서 초안 검토 및 상태평가 적정성 여부, 보수방법, 문제점 등 자문의견 수렴(보고서는 사전 자문위원에 전달)

□ 행정사항

❍ 자문의원 수당지급 : 45만원

- 산출내역 : 15만원/인 × 3인(참석:100,000 사전검토:50,000)

- 지출방법 : 용역비에 계상되어 있는 자문비로 선지급 후 정산.

□ 향후계획

❍ 2015. 05. 04 : 자문의견 반영 보고서 수정

❍ 2015. 05. 11 : 성과품 납품 및 용역 준공

❍ 2015. 05월중  : 용역결과 FMS 입력.  끝.