문서번호	시설과-2931
결재일자	2015.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
이동헌		이종한	04/22 이용태
협조
	주무관		남상국

용산가족공원 지하수 개발공사

설계변경사항 및 준공기한연기 검토 보고

2015. 4.

중부공원녹지사업소

시설과

용산가족공원 지하수 개발공사

설계변경사항 및 준공기한연기 검토 보고

위 공사와 관련하여 설계변경사항에 대해 전문가 자문을 거쳐 검토하고, 수질검사 및 관련사항 정비를 위한 준공기한을 연기하고자 보고드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 용산가족공원 지하수 개발공사

○ 공사기간 : ‘15. 4. 1 ~ 4. 27

○ 공사내용 : 착정공사, 모터설치, 상부보호장치 등

○ 도 급 자 : 평화지하개발㈜ 대표 김평화

○ 도 급 비 : 24,716천원

□ 자문결과 및 설계변경사항 검토

○ 자문결과

- 자문일자 : 2015. 4. 21(화)

- 자문위원 : 플러스파운틴(주) 김우진대표, 채움기술사사무소 김병채소장

- 결과내용 : 설계변경 필요성 및 내역 적정(별첨 자문의견서 참조)

○ 변경내용 : 착정심도 확대(100m → 200m)에 따른 내역변경

○ 도급비 변경

구분		금 액 (원)			비고
		당초	변경	증감
총도급비		24,716,000	32,100,000	증) 7,384,000
도급액	공급가액	22,469,091	29,181,818	증) 6,712,727
	부가세	2,246,909	2,918,182	증) 671,273
	계	24,716,000	32,100,000	증) 7,384,000

□ 준공기한 연기검토

○ 연기기간

- 당초 : 2015. 4. 1 ~ 4. 27

- 변경 : 2015. 4. 1 ~ 5. 15

○ 연기사유 : 용산가족공원 재정비사업 전기인입 일정에 맞춰 심정펌프 가동 및 수질검사를 실시한 후 관할 구청에 준공확인을 받는 행정소요(수질검사, 구청 준공필증) 추가 기간이 필요하여 연기하고자 함

○ 지체상금 부과여부 검토 : 미부과(연기사유: 발주처)

□ 보고의견

○ 기 실정사항 보고된 사항으로 관련 내용을 전문가 자문 등 의견을 반영하여 설계변경 처리하며, 추가 소요되는 행정필요기간은 공사기한을 연장하고, 추가 소요예산은 낙찰차액 및 당초 예산 잔액을 활용하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

첨부 1. 변경내역서 1부.

2. 자문의견서 2부.

3. 준공기한연기의뢰서 1부.

4. 제비율검증 1부.  끝.