투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시인재개발원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 보고(공사, 배움관 기전실 바닥방수 및 창의관 화장실 배수구 조정공사 기한연장)

1. 인재기획과–5144(2015.4.20.)호 관련입니다.

2. 배움관 기전실 바닥방수 및 창의관 화장실 배수구 조정공사 계약건에 대해 다음과 같이  감액 변경계약을 체결하였음을 보고합니다.

가. 계 약 명 :  다솜관(1층)공연장 및 음악당 설치공사 변경계약(감액)

나. 계약업체 : **************)

-  *******************************

다. 변경내역

구분	당초	변경후	비고
계약금액	16,780,000원		변경없음
계약기간	’15.4.16.~’15.4.20	’15.4.16.~’15.4.27

라. ******************************************************************************변경계약코자 함

마, 지체상금 : 없음

붙임 : 변경계약통보서 1부.  끝.

주무관	백일선		시설재무팀장	김종엽		인재기획과장	04/22 박기용
협조자
시행	인재기획과-5289	(		)	접수		(		)
우	137-070	서울 서초구 남부순환로 340길 57(서초동)	/	http://hrd.seoul.go.kr
전화	02 3488-2055	/전송	02 3488-2346	/	dshy@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)