함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	변경계약 의뢰

1. 우리 영등포아리수정수센터 『영등포 1정수지 내부방식공사』 시행 중 설계변경 사유가 발생되어 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건     명 : 영등포 1정수지 내부방식공사

나. 계 약 자 : (주)엘씨엠이엔지  대표자 박미애

다. 공사기간 : 총공사기간 2013. 9. 25. ~ 2015. 4. 30.

(1차수:‘13.9.25~’14.9.24, 2차수:‘14.7.25.~’15.4.30.)

차 수	구 분	계약금액	설계변경금액	증 감	비고
총 괄	총 공사비	1,436,969,870	1,420,468,000	-16,501,870
	계약금액	1,026,080,000	1,014,068,000	-12,012,000
	관 급 비	410,889,870	406,400,000	-4,489,870
1차수	총공사비	668,803,850	659,208,000	-9,595,850	준공금액
	계약금액	471,903,850	462,308,000	-9,595,850
	관 급 비	196,900,000	196,900,000	0
2차수	총공사비	768,166,020	761,260,000	-6,906,020
	계약금액	554,176,150	551,760,000	-2,416,150
	관 급 비	213,989,870	209,500,000	-4,489,870

라. 설계변경 내용

마. 설계변경 사유

- 공종별 물량증감 및 신규공종 발생에 따른 설계변경

- 건강, 연금, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금비 정산

첨부 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 시행 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의서 1부.  끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	김왕주		정수시설과장	유영춘		영등포아리수정수센터소장	04/22 임정규
협조자
시행	정수시설과-3549	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개