“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(마포석유비축기지 재생 및 공원화사업 관련 전략환경영향평가용역)

1. 공원조성과-5271(2015.4.22.)호와 관련입니다.

2. 우리과에서 추진 중인 “마포석유비축기지 재생 및 공원화사업 관련 전략환경영향평가 용역”에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 마포석유비축기지 재생 및 공원화사업 관련 전략환경영향평가 용역

나. 용역기간 : ‘14.10.27 ~ ’15.4.26.

다. 계약금액 : 금육천팔백오십사만육천이백원정(￦68,546,200원정)

라. 업 체 명 : ㈜동해종합기술공사 대표 정점래

마. 준공기한 연기

- 당 초 : ‘14.10.27 ~ ’15.4.26.

- 변 경 : ‘14.10.27 ~ ’15.6.30.

바. 지체상금 부과검토

- 연기사유 귀책소재 : 서울시 공원조성과

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 준공기한연기 검토보고 및 합의각서 각 1부.  끝.

	공원조성과장
주무관	가덕윤		생활공원팀장	유영봉		공원조성과장	04/23 오순환
협조자
시행	공원조성과-5287	(		)	접수		(		)
우	100-772	서울특별시 중구 무교로 21, 9층 공원조성과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2071	/전송	02-2133-1081	/		/	부분공개