문서번호	현장민원과-9372
결재일자	2015.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		현장민원과장		서부수도사업소장
양현식		조상덕		04/23 代이희세
협 조
	주무관				박처규

도시재생사업지구내

노후옥내급수관 교체 방안 보고

서부수도사업소

(현장민원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	∎
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	∎
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	∎
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	∎
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	∎
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	∎
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	∎
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	∎
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	∎

도시재생사업지구내 노후옥내급수관 교체 방안

서대문구 신촌동 일대 도시재생시범사업과 관련 노후된 건물 옥내 녹슨 급수관 교체사업을 연계 추진함으로써 깨끗하고 안전한 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함.

□ 추진배경

○ 서울형 도시재생사업(서대문구 신촌동 일대)과 연계하여 노후 옥내       급수관 교체사업 추진으로 최상의 아리수 공급 환경 조성

- 교체공사비(표준지원공사비) 최대 48% 인상으로 서민 부담 경감

【 관련근거】

○ 급수설비과-622(2015.1.28.): 노후 옥내급수관 표준지원공사비 조정

○ 급수설비과-1096(2015.2.13): ’15년 노후옥내급수관 교체(갱생)추진계획

○ 신촌동 도시재생시범사업 업무보고(서대문구 지역활성화과): 2015.4.7

- 주거환경분야 개선과 병행 추진으로 효율적인 사업 효과 기대

□ 사업개요

○ 대    상 : 신촌동 일대( 263,000㎡)

- 20년 이상 노후건축물 약 79.4%․아연도강관 190가구

○ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년

위치도

□ 추진목표

(단위: 백만원)

구 분	계	2015년	2016년	2017년	2018년
목표가구	190	20	60	70	40
사 업 비	128	13	40	47	28

□ 세부추진계획

○ 준비단계 : ’15. 4. 20 ~ 4. 27

- 대상가구 목록 작성

- 홍보, 사업 추진에 필요한 다양한 조력집단 수집

￭행정망 : 해당지역 통, 반장

￭지역망 : 지역신문, 케이블방송사, 설비업체, 인테리어업체, 공인                   중개사 등

○ 추진단계

- 홍보계획

￭ 집중홍보 : ’15. 5. 1 ~ 5. 31

․대상가구 가가호호 홍보물 배포(옥내급수관 내시경 촬영 병행)

※ 내시경 결과 확인으로 시민 경각심 고취 ⇒ 적극 교체 유도

․지역조력집단 활용 홍보시행

※ 홍보물 부착․비치 및 안내 협조의뢰

￭ 기간홍보 : ’15. 5. 31 ~

․ 매월 해당주소로 홍보문(공문 포함) 배포

○ 추진방법

- 대상목록에 의거 연차별 시행

- 해당구청과 유기적인 협조체계 유지(공청회 등을 통한 홍보)

￭ 도시재생사업 주민공청회를 통한 홍보 등

- 2018년 사업종료 시까지 별도 중점 관리(매월 실적 관리)

□ 문제점 및 대책

○ 문제점 : 홍보, 가구당 내시경 촬영 등에 따른 인력 부족 예상

○ 대  책 : 옥내누수탐지 요원 및 기간제 근무자 수시 활용 보강

- 기존 : 옥내급수관 컨설팅 인력 2명

- 보강 : 4명(옥내누수탐지 3명, 기간제 근무자 1명)

※ 향후 기간제 근무자 추가 확보(2016년 본부 요청)

□ 기대효과

○ 연차별 지속적인 관리로 목표달성

- 노후옥내급수관 100% 교체로 음용환경 개선

○ 도시재생사업과 병행 추진으로 사업 효율성 증대

□ 행정사항

○ 우수직원 인센티브 부여 (직원 포상 등)

○ 매월 실적 평가(교체, 홍보 실적 등)

○ 소요예산 확보 : ’15년 배정예산 사용

- 부족분 발생 시 본부 추가 요청

○ 노후옥내배관 컨설팅 요령 및 복장 준수 등 민원응대 교육 실시

홍보물 부착	지원절차 안내	관 내시경 검사

따로붙임 : 1. ’15년 노후옥내급수관 교체(갱생)추진계획 1부

2. 신촌동 도시재생시범사업 업무보고 1부

3. 홍보 및 교체 실적 월별 보고양식 1부

4. 도시재생사업지구 노후옥내배관 대상건물 1부.  끝.