문서번호	홍보마케팅과-2793
결재일자	2015.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	홍보마케팅과장	경영관리부장
최을영	박진용	04/23 정진일

아리수 상징조형물 기능 추가 및 이전 설치 계약 변경 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4

홍보마케팅과

아리수 상징조형물 기능 추가 및 이전 설치 계약 변경 계획

아리수 상징조형물 기능 추가 및 이전 설치와 관련해 조형물의 안전한 설치 및 완성도를 높이기 위해 제작(계약)기간을 변경하고자 함

□ 계약건명

○ 아리수 상징조형물 기능 추가 및 이전 설치 용역

□ 계 약 자 : 이제석 광고연구소(대표 이제석)

□ 계약기간 : 2015. 4. 9. ~ 4. 30.

□ 계약금액 : 금 30,305,000원

□ 계약내용

○ 아리수 상징조형물에 수돗물이 나오는 효과 추가 및 지지대, 조명 설치

□ 변경사항

○ 계약기간

- 변경전 : 2015. 4. 9. ~ 4. 30.

- 변경후 : 2015. 4. 9. ~ 5. 29.

○ 변경사유 : 조형물의 안전한 설치 및 완성도 제고.  끝.