문서번호	시설보수과-1913
결재일자	2015.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
조장호		04/23 박용선
협조

실정보고 사항 검토보고

【성내교 보수공사】

동부도로사업소

(시설보수과)

실정보고사항 검토보고

【성내교 보수공사】

우리 사업소에서 시행중인 성내교 보수공사와 관련하여 시설

관리공단으로부터 보수공(단면보수,표면처리)에 대한 실정

보고서가 접수되어 검토 결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 실정보고(보수공 수량조사 요청관련) 제출

⇒ 시설관리공단 공사감독1처 – 3554 (2015. 4. 22.)

공사개요

○ 공 사 명 : 성내교 보수공사

○ 공사기간 : 2014. 10. 31 ~ 2015. 5.31

○ 공사개요 : 받침교체 90개소, 표면보수 162㎡, 단면보수 126㎡

○ 도 급 비 : 345,125,000원

○ 계 약 자 : ㈜ 선우씨앤드에이건설  대표 정 우 금

실정보고 사항

○ 당초 계약된 설계내역서 표면보수(162㎡) 및 단면보수(126㎡)

물량과 설계도면상의 물량이 상이함.

○ 현장조사 결과 단면보수 및 표면처리를 시행하기 위해서는 공중

비계 시공물량의 증가가 필요함.

○ 교량받침 교체 및 단면보수시 발생되는 폐 콘크리트 처리비가

미 반영됨(발생수량 : 27톤)

검토결과

○ 설계도서상의 표면보수, 단면보수 및 공중비계 물량이 현장조사

결과 아래와 같이 상이한 상태임.

구 분	설계 내역서	설계도면	현 장 조사결과	비고
표면처리	162㎡	62.04㎡	87㎡
단면보수	126㎡	48.85㎡	32.5㎡
공중비계	550㎡	-	1,320㎡

조치계획

○ 위와같이 설계도서와 현장조사 결과 상이한 공종(표면처리,단면

보수,공중비계) 및 미 반영된 폐기물 처리비에 대하여는 변경시행

하고 추후 설계변경시 반영토록 시설관리공단에 통보 코자함.