“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰

우리과에서 시행중인 ‘제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 기본설계용역’에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용역명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 기본설계

2. 계약자 : ㈜유신 외 2

3. 준공기한 연기내역

구 분	총 차	1 차
		당 초	변 경
변경내역	변경없음 (2015.12.30.)	2015. 4. 30	2015. 6. 30

4. 귀책사유 : 서울특별시

따로 붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기방침서 1부.

3. 용역계약 변경합의서 1부. 끝.

	도로계획과장
전문관	정용훈		도로정책팀장	이승석		도로계획과장	04/23 최동필
협조자
시행	도로계획과-5603	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110 서울특별시청 10층 도로계획과	/
전화	02)2133-8067	/전송	02)2133-0763	/	hoon0916@seoul.go.kr	/	대시민공개