문서번호	방재시설부-5381
결재일자	2015.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	04/23 임춘근
협조
	주무관		고소영

『경춘선 폐선부지 공원조성공사』

새터언덕 굴다리 앞 경사로 미끄럼방지포장

실정보고 검토

2015. 04

도시기반시설본부

방재시설부

『경춘선 폐선부지 공원조성공사』

새터언덕 굴다리 앞 미끄럼방지포장 실정보고 검토

「경춘선 폐선부지 공원조성공사」 새터언덕 굴다리 앞 경사로 미끄럼방지

포장에 대한 건설사업관리단 실정보고 검토 보고임.

▶ 관련근거 : 경의경춘(감) 제2015–362(2015.04.20)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성공사(1단계)

○ 위    치 : 노원구 공릉동 공덕제2철도건널목 ~ 육사삼거리

○ 규    모 : 공원조성 연장(L)=1.90km, 면적(A)=48,170㎡

○ 사업기간 : 2013.10.10. ~ 2015.5.15

○ 공 사 비 : 6,044백만원

Ⅱ

검토내용

○ 새터언덕 굴다리 앞 경사로 현황

- 현장전경

○ 시행방안 검토

- 새터언덕 굴다리 앞 경사로 구간은 고저차에 의한 종단경사가 일정하지 않고보행자가 함께 통행하는 공간으로 보행자의 안전성 확보를 위하여 미끄럼방지 포장을 시행하는 것은 적정하다고 판단되며,

- 일반적인 아스팔트 포장에 적용하는 공법 중 시공성이 우수하고, 경제적인 수지계 표면처리 공법이 적정하며, 경관을 고려하여 흑색이 바람직

예시) 미끄럼방지포장(적색)	예시) 미끄럼방지포장(흑색)

※ 면적 : 170㎡(L=27.91m,B=6.09m, 경사로 차도구간)

Ⅲ

건설사업관리기술단 검토의견

○ 상기와 같이 『경춘선 폐선부지 공원조성공사』 새터언덕 굴다리 앞 경사로 미끄럼방지포장에 대하여 검토한 결과 겨울철 도로 결빙에 따른 교통사고 발생과 보행자의 안전성 확보를 위하여 시행하는 것은 타당한 것으로 판단됨.

Ⅳ

보고자 의견

○ 『경춘선 폐선부지 공원조성공사』 새터언덕 굴다리 앞 경사로 미끄럼방지포장에 대한 건설사업관리기술단의 검토의견은 타당하며,

○ 품질확보를 위하여 관급자재(설치도, 나라장터 종합쇼핑몰)로 등재된 전문  업체를 선정하여 시행코자 함.

※ 단가는 두께별로 상이하며 ㎡당 30,000원 소요 예상

붙 임 : 건설사업관리기술단 실정보고서 1부.  끝.