문서번호	도로보수과-4046
결재일자	2015.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
권세봉		04/23 이규철
협 조
	주무관		이상하

2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시 완료 보고(제2차)

2015.  04. 22(수)

서부도로사업소

(도로보수과)

2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시 완료 보고(제2차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 계약기간 : 2015. 03. 03. ~ 2015. 12. 31.

○ 시 공 사 : 홍기건설산업(주) 대표 안순배

○ 도 급 비 : 359,018,200원

□ 작업완료 보고

○ 건  명 : 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제2차)

○ 작업위치 : 용산구 백범로99가길 9 등 14개소

○ 작업기간 : 2015. 03. 31. ~ 2015. 04. 20.

○ 작업내역

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
1	용산구 백범로 99가길 9	110m	65m	감) 45m	현장 여건변화로 물량변동
2	용산구 백범로 284-1	90m	0m	감) 90m	기 작업완료구간으로 작업취소
3	용산구 문배동 백범로 90다길	120m	69m	감) 51m	문자 기 작업완료 문자 미 작업
4	중구 동호로(장충체육관~청계5가)	21,566m	20,217m	감) 1,349m	설계착오로 인한 시공물량 변동
5	용산구 국방부 앞 교차로	46m	41m	감) 5m	시공물량 차이
6	용산구 녹사평대로(이태원지하차도 옆)	19m	19m	-	시공물량 차이
7	마포구 모래내로 자동차정비단지 앞	928m	845m	감) 83m	시공물량 차이

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
8	마포구 증산로(증산지하차도~월드컵경기장)	12,513m	12,501m	감) 12m	시공물량 차이
9	은평구 수색이마트 주차장 옆	120m	120m	-
10	서대문구 홍은사거리	2,211m	2,211m	-
11	은평구 대성주유소 앞(버스중앙차로)	36m	36m	-
12	은평구 산골고개 앞(버스중앙차로)	36m	36m	-
13	서대문구 한성과학고 앞(버스중앙차로)	44m	44m	-
14	마포구 가양대로 수색교 주변	1,002m	1,002m	-
합 계		38,841m	37,206m	감) 1,635m

○ 소요금액

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
제2차 작업지시	56,665천원	53,401천원	감) 3,264천원

○ 변경사유

- 기 작업완료구간으로 작업 취소 : 1개소

- 문자 기 작업완료 문자 미 작업 : 1개소

- 시공물량에 따른 작업물량 차이 : 4개소

- 현장 여건변화로 인한 물량변동 : 1개소

- 설계착오로 인한 시공물량 변동 : 1개소

붙 임 : 1. 제2차 작업완료 내역서 1부.

2. 제2차 작업완료 사진대지 1부.

3. 제2차 작업완료 도면 1부(별도첨부).  끝.