투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	지하철 923공구 책임감리원
(경유)
제 목	교통신호시설 원인자 부담공사 공기연장 승인 통보(923공구)

1. 동명감 923 제2015-095호(15.03.23.)와 관련입니다.

2. 동부도로사업소로부터 지하철 9호선 923공구 건설공사 관련 교통안전시설(신호) 원인자 부담공사의 공사기한 연장의 건이 아래와 같이 승인되어 알려 드립니다.

가. 공사내용 : 교통신호기 신설 및 이설

나. 준공기한

- 당초 : 2014.12.31.

- 변경 : 2016.03.21.

첨부 : 관련공문 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	엄태용		토목1과장	代황왕연		도시철도토목부장	04/24 한동근
협조자	주무관	김용선
시행	도시철도토목부-5216	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스 9층 도시철도토목부	/
전화	02-772-7212	/전송	02)772-7306	/	seoulite04@seoul.go.kr	/	대시민공개