투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(도로계획과장)
(경유)
제 목	설계용역 준공기한 연기 요청 (한강상 교량 연결램프 구조개선(강남지역) 기본 및 실시설계)

1. 우리 본부에서 시행 중인 『한강상 교량 연결램프 구조개선(강남지역)기본 및 실시설계 용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 한강상 교량 연결램프 연결램프 구조개선(강남지역) 기본 및   실시설계 용역

나. 용역개요

- 램프신설 : R-J L=1,383M,R-K L=647M

- 램프이설 : R-E L=498M,R-G L=667M

R-F L=325M,R-G(접속) L=96M

- 본선이설 : 하남방향 L=1.50㎞

김포방향 L=1.46㎞

다. 계 약 자 :

- 설계사 : ㈜대한콘설탄트외 1개사

라. 준공기한 연기현황

구 분	용 역 비	당초준공기한	변경준공기한	비 고
설계용역	905,850,000원	′15. 4.30	′15. 6.30	증)60

마. 귀책소재 및 연기사유

- 연기에 따른 귀책소재 : 도급자에 있지 않음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 : 기본설계 재심의 및 관계기관 협의 등에 따른 설계기간 부족

첨부 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	윤원섭		토목설계과장	이승우		토목부장	04/24 노우성
협조자
시행	토목부-8559	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개