문서번호	생태공원과-1079
결재일자	2015.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	생태공원과장	공원부장
서은교	최병언	전결 04/24 장상규
협 조	시설관리과장		박희철
	기전설비2과장		신용철
	기전설비1과장		김남수
	녹지관리과장		문경재
	환경과장		이철범
	공원기획과장		박노원
	주무관		임이환
	주무관		김태수
	주무관		김봉선

“양화한강공원 친수공간 조성공사”

시설물 인수인계 계획

2015. 4.

한강사업본부

(생태공원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

“양화한강공원 친수공간 조성공사”

시설물 인수인계 계획

우리본부에서 사업추진한 ｢양화한강공원 친수공간 조성공사｣가 완료됨에 따라 유지관리 부서에 시설물을 인수인계하여 향후 시설이용 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

관련근거

○ 시설관리공단 공사감독3처-2287(2015.03.20)

○ 생태공원과-762(2015.03.27)

공사개요

○ 위    치 : 양화한강공원 둔치(성산대교 남단 상류)

○ 규    모 : 28,000㎡, 연장 0.27㎞

○ 공사내용 : 물놀이장, 실개천, 자연형호안, 산책로, 주차장정비, 수목식재 등

○ 공사기간 : 2013.12.27 ~ 2015.04.15

○ 사 업 비 : 4,330백만원(도급 3,241백만원, 관급 1,002백만원, 이전 87백만원)

○ 시 공 사 : 태흥개발㈜ 대표 신현종, 정나라건설㈜ 대표 이완규

○ 감독부서 : 서울특별시 시설관리공단 공사감독3처

관리부서별 인수인계 대상 시설현황

관리(인수)부서	주 요 시 설 내 용
공원기획과	◦ 물놀이장, 주차장 운영 및 관리(총괄) ◦ 물놀이장 시설 - 매표소 : 8400*3900*2600*1개소 - 종합안내판 및 표지판 ◦ 주차장 시설(총 410면 - 일반333,여성60,장애인17) - 주차장 내 소형고압블럭, 투수잔디블럭, U형 측구, 스틸볼라드, 시선유도봉

관리(인수)부서	주 요 시 설 내 용
기전설비2과	◦ 시설물 ※ 물놀이장 내 토목시설 - 물놀이장 : 2,554㎡ - 계류시설 : 1식 - 안전휀스 : 231경간 - 슬라이딩게이트 : 3개소 - 원형앉은벽 : 3개소 - 샤워시설(트렌치,판석,가림막): 2개소 ◦ 포장공 - 목재데크 : 686㎡ - 경계석 : 1,323m - 화강석블럭포장: 수영장 내 시설 ◦ 배수공 – 집수정 : 수영장 내 시설
기전설비1과	◦ 기계설비시설 - 기계실(펌프실) : 23.76㎡ - 점검용사다리 : 2조 - 수중모텨펌프 : 9대 - 이동식기계실 : 1식 - 물놀이장 급·배수관 : 1식 - 여과기 : 2세트 - 샤워기 : 8세트 - 밸브류 : 1식 ◦ 전기시설 - 전기맨홀 : 5개소 - 전기관로 : 1식 - 공원등 : 27본 - 수변전설비 : 1식 - 인입전력케이블 :980m
시설관리과	◦ 하천공 ※ 물놀이장, 주차장 외 토목시설 - 사석부설(자연형호안) : 3,073㎡ ◦ 배수공 - 우수관 : D450~600㎜ 337m - 집수정 : 수영장 외 시설 - PE이중벽관 : 327m - U형측구: 물놀이장,주차장 외 - 오수맨홀 : 7개소 ◦ 포장공 - 아스콘포장 : 324㎡ - 화강석블럭포장: 수영장 외 시설 - 시인성포장 : 113㎡ ◦ 상수공 - 주철관(D150㎜) : 366m - 제수변 : 11개소 - 밸브실 : 1개소 - 사각맨홀(그레이팅) : 1개소 ◦ 초기 우수처리시설 - 비점오염 저감장치 : 2개소 ◦ 교통표지판 : 6개소
녹지관리과	◦ 수목 및 초화류 식재 - 교목·관목 : 느릅나무 외 18종 20,945주 - 초 화 류 : 노루오줌 외 11종 33,970본 - 식물매트 : 1,900㎡, 잔디 2,394㎡ ◦ 조경시설 - 등의자 : 7개소 - 음수전 : 2개소
환 경 과	◦ 화장실 - 부상식 : 2개소

조치계획

○ 상기와 같이 관리(인수)부서별 시설물 인수인계 시행

따로붙임: 인수인계서,인계시설현황,합동점검 지적사항 조치결과 각1부. 끝.