투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	변경계약(설계변경-분뇨처리시설 유입저류조 증설공사) 의뢰

1. 슬러지재활용과-3077(‘15.4.27) “설계변경(분뇨 유입저류조 증설공사) 시행(2차)” 및 서울특별시시설관리공단 공사감독2처-4014(’15.4.23)호 “설계변경 보고서 제출(2회)”과 관련입니다.

2. 분뇨 유입저류조 증설공사 시행과 관련 아래와 같은 사유로 변경계약(설계변경)을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사 유 : 1차 설계변경에 의한 이설비(242백만원)중 확정부분 반영

나. 주요 내용

- 지장물 철거 : 지중 구조물(587㎥) 발견으로 철거작업량 증가

- 가설사무실 설치(3개소)

- 사토운반 : 거리(증) 13km→36km, 물량(감) 7,125㎥→6,801㎥

- 계측기 설치 : *****************************

- 유입저류조 통기관 설치(4개소)

- 이설비 감액(242,232천원→159,857천원) : 공사진행시 추후 설계변경사항 반영(사후 정산)

다. 변경내역

구 분		최 초	1차(‘14.12.26)	2 차	증 감
총 공 사 비		*************	*************	*************	*
도급액	공급가액	*************	*************	*************	**************
	부 가 세	***********	***********	***********	**************
	계	*************	*************	*************	**************
관급자재		***********	***********	***********	**************
이 설 비			***********	***********	**************

*****************************************

****************************************

****************************************

마. 계약업체 : ㈜보훈종합건설 외 1

바. 예산과목 : 중랑물재생센터오니처리유지보수. 시설비, 분뇨처리시설 유입저류조 증설

첨부 : 설계변경 관련서류 각 1부. 끝.

	슬러지재활용과장
지방환경사무관대우	하병문		슬러지재활용과장	04/27 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-3079	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 차장터 5길(송정동 73)	/
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	hbm4146@seoul.go.kr	/	부분공개