투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	「재사용플라자 건립공사」현장관리 철저 및 설계변경 협조

1. 귀 사에서 우리본부와 용역계약 체결하여 시행중에 있는『재사용플라자 건립공사 건설사업관리용역(감독권한 대행)』과 관련입니다.

2. 본 공사는 지난 1월 15일 착공하여 기공식(‘15.4.2) 이후 계약상 계획공정 대비 공정 진척사항이 없어 공정지연이 우려되고 있는 실정인 바, 아래와 같이 협조요청하오니 사업이 원활히 추진될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공정관리

- 건설기술진흥법 시행령 제59조 제5항 및 건설사업관리업무지침서(건설교통부 고시 제2014-304호) 제60조 제⑥항에 규정한 바와 같이 공정진도율이 계획공정대비 누계공정 실적이 5%이상 지연되었으므로 부진사유, 근로자 안전확보를 고려한 부진공정 만회대책 및 만회공정표를 수립하시고, 그 결과를 2015.5.6.까지 제출하여 주시기 바람

나. 안전관리

- 당 현장은 건축·토목·조경뿐만 아니라 지열 천공공사, 기계, 전기, 통신, 소방 등 여러공종이 혼재되어 있어 공종별 유기적인 협력이 필요함

- 따라서 위  지침서 제61조에 의거 현장규모 및 작업내용에 따른 안전조직을 구성하여 산업안전보건법에 명시된 업무를 수행토록 조직편성 및 실질적인 안전활동이 되도록 조치바람

다. 설계변경(붙임 방침내용 참조)

1) 부지 남측방향으로 연결데크 설계 및 시공 추진

2) 기공식 소요경비(5백만원)를 공사내역서에 반영조치

붙임 : 설계변경 방침서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	(주)펨코엔지니어링 건축사사무소 대표이사 김수호(건설사업관리단 책임기술자 김일영),(주)아이티엠코퍼레이션건축사사무소 대표이사 이길동
★지방시설사무관대우	차무흥		환경시설과장	신명승		건축부장	04/27 代강성욱
협조자
시행	건축부-4843	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8(프리미어플레이스 빌딩 13층)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	cmh2932@seoul.go.kr	/	대시민공개