투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(자전거도로 유형 변경에 따른 설계도면 작성비용 반영 실정보고 승인 알림)

1.업무지시현장 :  선사로~고덕지구간 도로확장공사 (주)한국건설관리공사, 선사로~고덕지구간 도로확장공사 주식회사 대저건설

2.작 성 일 자 : 2015-04-27 00:04:00

3.지 시 내 용

가. 선사고덕0420-171호(2015. 4.15.)호 및 토목부-8617(2015. 4.27.)호와 관련임.

나. “선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사”와 관련하여 자전거도로 유형 변경(차도분리형, 편방향 → 보도높이형, 양방향)에 따른 설계도서 작성비용 반영을 위한 실정보고에 대하여 감리단에서 실정보고한 검토의견과 같이 승인하니, 증액되는 공사비에 대하여는 추후 설계변경에 반영하시기 바라며,

다. 아울러, 현재 확보된 동일 도로폭 내에서 도로시설기준에 부합되는 자전거도로 및 측대 확보를 위해 중앙분리대 삭제 등을 검토하시기 바랍니다.  끝.

※ 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송 처리 됩니다.

주무관							이한규			광역도로과장					04/27 진재섭
협조자
시행			토목부-8653									(						)		접수											(						)
우	100-777					서울 중구 무교동 96(청계천로 8) 프리미어플레이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2556						/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개